문서번호	공공재생과-7578
결재일자	2020.7.17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		공공재생정책팀장	공공재생과장
김지호		代김지호	07/17 이동일
협조

- 서울로2단계 연결길 조성 사업 관련 -

[중림1길]성요셉 아파트 일대 구간 환경개선사업 공사시행

2020. 7

공공재생과

- 서울로2단계 연결길 조성 사업 관련 -

[중림1길]성요셉 아파트 일대 구간 환경개선사업 공사시행

서울로2단계 연결길 조성 시범사업 중 중림1길 성요셉 아파트 일대 구간 환경개선사업에 대한 설계가 완료되어 아래와 같이 공사 시행하고자 함

Ⅰ				추진개요		‘

□ 추진근거

○ 서울로2단계 연결길 조성 기본계획 수립(‘19.10.29)

○ 서울로2단계 연결길 조성 사업 실행계획 수립(‘19.10.31)

○ [중림1길]성요셉 아파트 일대 구간 환경개선 설계용역 시행계획(‘19.11.14)

○ 서울로2단계 연결길 조성 추진 사항 보고(‘20.6.18)

□ 사업개요

○ 위    치 : 중구 서소문로6길(서울로2단계 연결길 중 중림1길)

○ 규 모 : 연장(L)=241m (면적 1,726㎡)

(성요셉아파트 입면개선 포함 일부구간만(L)=116m (입면면적 1,250㎡)

○ 기본계획안

- 성요셉 아파트 입면개선 지원 - 성요셉길 바닥패턴 및 건축물 경계 부위 정비 - 녹지 조성 및 경관 조명 설치 등

□ 추진경위

○ ‘19.10.31 : 서울로2단계 연결길 조성 사업 실행계획 수립

○ ‘19.11.15 : 마중마당길 조성사업 시행계획 수립

○ ‘19.12.05 : 설계용역 계약(에브리아키텍츠 건축사사무소)

○ ‘20.01~05 : 골목스튜디오 운영을 통한 주민의견 수렴 등

○ ‘20.06~07 : 기본 및 실시설계완료. 내역서 검토 등

Ⅱ				공사시행계획		‘

□ 주요내용

****	**	****	**
*************	************* *************** ***************	******
**********	*****************
********	*********	******
************	**	************

□ 세부내용

*****************

*************************************************

********************************************************

************

***************************************************************************

****************

*******************************************************************************

Ⅲ				추진일정		‘

○ ‘20.07.        : 공사 의뢰 및 예산재배정(시→중구)

○ ‘20.08~10.   : 공사완료, 상생협약 체결

○ ‘20.10~12.   : 사업완료

Ⅳ				행정사항		‘

□ 부서별 추진 사항

○  시(공공재생과)  : 사업총괄, 예산 재배정, 안내표지 및 가로시설물 설치

유지관리를 위한 상생협약 등 체결

(서울역 일대 도시재생지원센터 협조)

○ 중구(도로시설과) : 복구도로 재포장 공사

○ 중구(도심재생과) : 공사발주 및 시행

□ 예산재배정

○ 재배정액 : 600,000천원

○ 예산과목 : 도시재생특별회계, 도시재생실 공공재생과, 공공재생계획수립, 공공개발 및 공공공간 확충(도시개발), 서울로2단계 연결길 조성, 시설비(205-401-01)

※ 예산범위 내 공사시행 후 잔액은 공공재생과로 반납

붙임 : 설계관련 서류 1부(별도송부).  끝.