문서번호	방재시설부-10145
결재일자	2020.7.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
홍민철		김태중	07/20 박홍봉
협조

『국회대로 지하차도 및 상부공원화(1단계)』

건설기술진흥법상 안전관리비 사용계획 검토보고

2020. 7.

도시기반시설본부

(방 재 시 설 부)

『국회대로 지하차도 및 상부공원화(1단계)』

건설기술진흥법상 안전관리비 사용계획 검토보고

『국회대로 지하차도 및 상부공원화(1단계)』 건설공사에 누락된   건설기술진흥법상 안전관리비를 반영하여 안전하게 사업 추진코자 함

[관련공문 : 이산2020-국회대로(건)-182호(2020.06.26.)]

Ⅰ		사업개요

○ 공사구간 : 서울시 양천구 신월동 신월IC ~ 양천구 목동 목동교

○ 공 사 명 : 국회대로지하차도 및 상부공원화사업(1단계)

○ 위    치 : 서울시 양천구 신월IC ∼ 경인2지하차도 박스시점

○ 규    모 : 연장 1,220m, 폭 55m

지하차도 구조물 신설 995m(U-Type 260m, Box Type 295m)

○ 공사기간 : 총차 ’18.8.8.~ ’22.9.15.

○ 공 사 비 : 70,105백만원

Ⅱ		관련근거

○ 건설기술 진흥법 제63조 제1항, 동법 시행규칙 제60조

○ 건설공사 안전관리 업무수행 지침 제51조

○ 국토교통부 건설안전과-600(2019.02.01.), 기술심사담당관-3155(2019.2.13.)

- 건설기술진흥법상 안전관리비 계상 철저

Ⅲ		안전관리비 사용계획

○ 사용계획

항 목	내 용	반영금액	비고
1.안전관리계획의 작성 및 검토비용	ㆍ중첩구간, 잔여구간 각 1회→ 중첩구간 착수시 잔여구간 실시설계 미완료에 따라 각각 분할하여 시설안전공단에 검토)	19,100,000	금회 반영
2.영 제100조 제1항 제1호 및 제3호에 따른 안전점검비용	ㆍ도급에 기 반영되어 제외함	-	-
3.발파ㆍ굴착 등의 건설공사로 인한 주변 건축물 등의 피해 방지대책 비용	ㆍ공사장 주변건축물 피해방지(소음․ 진동․ 균열 등)를 위한 연도변 조사비용 반영	61,240,000	금회 반영
4.공사장 주변의 통행안전관리 대책 비용	ㆍ중앙연속류 교통소통 및 시설 유지관리비 (야간 안전시설, 가로등기구교체 등)반영 ㆍ임시전기, 오폐수처리시설 이동설치 (교통소통전)	97,641,250	금회 반영
5.계측장비, 폐쇄회로 텔레비전 등 안전 모니터링 장치의 설치 운용 비용	ㆍ계측장비는 도급에 기 반영되어 제외함 ㆍ신강 보도육교, 당모래 보도육교에 폐쇄 회로 텔레비전을 상 ․ 하행 각각 1개소씩 설치하여 안전 모니터링 시행	30,792,640	금회 반영
6.법 제62조 제7항에 따른 가설 구조물의 구조적 안전성 확인에 필요한 비용	ㆍ2m이상 흙막이 가시설중 광역상수도 보 호공 노출구간, 조기 해체구간 및 교통 처리시 현장여건 변화에 따른 가시설 안정성검토 등	65,700,000	금회 반영
합 계		274,473,890

Ⅳ		건별 상세 검토

▸ 1. 안전관리계획의 작성 및 검토비용  ⇒ 반영

- 시행규칙 제60조(안전관리비)제1항제1호에 해당

▸ 2. 안전점검비용  ⇒ 기반영

- 시행규칙 제60조(안전관리비)제1항제2호에 해당하나 내역에 기반영

▸ 3. 발파ㆍ굴착 등의 건설공사로 인한 주변 건축물 등의 피해방지대책 비용⇒ 수정 반영

- 산출 내역중 생활 소음 및 진동측정은 회당으로 계획 되었는바, 지침[별표7] 안전관리비 계상 및 사용기준에 부적합하여 제외

- 연도변 좌·우측 인접건물 1,2열 사전정밀조사 비용 반영

▸ 4. 공사장 주변의 통행안전관리 대책 비용   ⇒ 반영

- 교통통제 안전시설비, 가로등기구 교체 및 유지관리비는 통행안전 및 교통소통에 필요

- 공사시행 중 제설함 및 염화칼슘 등은 통행안전에 필요

- 잔여구간 바이패스갱 공사구간에 위치한 제물포터널의 임시전기시설 이설비 및 오폐수처리시설의 철거에 따른 안전시설보강(수중펌프 및 고압배관)은 공사시행 중의 통행안전 및 교통소통을 위해 필요

※ 2020년(2차분) 공사추진계획(변경) 검토보고 (방재시설부-5957, 2020.4.24.)

※ 붙임2. 오폐수처리시설 및 수전반 이설 세부사항

▸ 5. 계측장비, 폐쇄회로 텔레비전 등 안전 모니터링 장치의 설치ㆍ운용 비용  ⇒ 반영

- 계측장비는 내역에 기 반영, 폐쇄회로 텔레비전 상·하행 각1개소 설치 운용 반영

▸ 6. 가설구조물의 구조적 안전성 확인에 필요한 비용 ⇒ 반영

- 공사중 가시설 설치·변경·해체 단계별 가시설 안정성 확인 필요

Ⅴ		조치계획

❍ 건설사업관리단에 보완 승인 통보하고 설계변경시 반영 후 정산조치

❍ 제출된 계획서에 첨부된 견적서는 건설사업관리단에서 실행가로 견적받아 정산토록 지도

붙임 : 1. 관련문서 1부.

2. 오폐수처리시설 및 수전반 이설 세부사항 1부.  끝.