문서번호	현장민원과-8702
결재일자	2020.7.20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	현장민원과장	강동수도사업소장
최철우	김인웅	07/20 안병희
협 조	주무관		신태권
	주무관		정지훈

수도계량기 교체공사 시행계획

2020.  7.

강동수도사업소

현장민원과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

수도계량기 교체공사 시행계획

2015~2017년 우리 사업소 납품되어 현장 설치된 현장 설치된 품질규격 위반 수도계량기 교체공사를 시행하고자 함.

□ 추진근거

○ 제293회 임시회 환경수자원위원회

- 송명화의원: 재질기준 초과 계량기 교체를 위한 사업비 조기 집행

○ '20년 상수도사업본부 예산안에 대한 수정안(시의회)

- 수도계량기 교체 60억원 증액

○ 수도계량기 교체공사 시행계획(계측관리과-4854, '20. 5.27.)

□ 추진경과

○ '20. 5.28. 공사계약 원가심사 요청(계약심사과)

○ '20. 5.29. 교체대상 전산등록 요청(전산정보과)

○ '20. 6. 3. 일상감사 의뢰(감사담당관)

○ '20. 6.12. 일상감사 의견에 대한 조치결과 제출(감사담당관)

□ 공사개요

○ 공 사 명: 강동수도사업소 수도계량기 교체공사

○ 공사위치: 강동수도사업소 관할지역 내

○ 규    모: 소형 수도계량기 5종 9,730개

○ 공사기간: '20. 8. ~ (착공일로부터 110일)

○*************************************

○ 예산과목: 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수도계량기 교체, 수선유지교체비, 급수계량기교체비

□ 추진계획

○ 추진방법: 8개 수도사업소별 별도 발주

- 상수도사업본부(계측관리과): 계약심사 및 일상감사 일괄 추진완료

- 수도사업소: 공사발주 및 감독

○ 입찰(계약방법) 및 날찰자 결정

- 입찰방법: 제한경쟁입찰(지역제한)

- 입찰자격: 건설산업기본법 제2조에 따른 전문공사업자로 기계설비공사업 또는 상․하수도설비공사업을 등록한 업체

- 낙찰자 결정 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준(시설공사 적격심사 세부기준)

※ 공사계약 및 적격심사 기관: 서울시 재무과

- 현장설명: 미실시(지방계약법 시행령 제15조 제3항의 단서 규정에 의거 생략)

□ 관급자재(수도계량기) 공급 및 반납

○ 자재지급: 수도자재관리센터에서 구매하고 사업소에 지급

- 관급자재 요청은 공사계약 후 착공이전 자재센터와 협의하여 수령 지급

(단위: 개)

계	15mm	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm
9,730	7,799	739	413	503	276	-

○ 교체품 회수: 계약업체에서 수도자재관리센터에 반납

※ 단, 철거지침 디지털카메라로 촬영하여 수도사업소에 제출

□ 향후계획

○ '20. 7. 수도계량기 교체공사 발주

○ '20. 8. 수도계량기 교체공사 착공

○ '20.11. 수도계량기 교체공사 준공

붙임  1. 수도계량기 교체공사 설계내역서 1부.
2. 수도계량기 교체공사 시방서(안) 1부.  끝.