문서번호	기전과-6655
결재일자	2020.7.21.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
이성도		07/21 서승완
협조

『교통안전시설 원인자부담공사(개봉지구 기업형 임대주택)』

감리사 실정보고에 대한 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 5.

『교통안전시설 원인자부담공사(개봉지구 기업형 임대주택)』

감리사 실정보고에 대한 검토보고

우리사업소에서 승인한 교통안전시설(신호) 원인자부담공사와 관련    감리사로부터 현장 실정보고서가 제출되었기에 검토보고 드림.

Ⅰ		관 련 근 거

교통관리과-7880(2020.04.24.)호

대영전기감 GE 20C-07-19(2020.07.20.)호

Ⅱ		공 사 개 요

공 사 명 : 서울개봉지구 공공지원민간임대주택 신축 교통안전시설물 설치공사

원 인 자 : ㈜케이지엠씨개발

공사기간 : 2020.06.09. ~ 2020. 10. 31.

공사장소 : 구로구 개봉동 222 주변

공사개요 : 교통신호기 신·이설 및 교통안전표지 개선

관련업체 및 주요설치 내용

구 분	설 계	감 리	시공업체	승인주요내용
신호기	㈜동림티엔에스	대영유비텍㈜	㈜창희인엔에스	제어기 신설 1대 지주 신설4(통합1), 철거6본 신호등 신설8, 이설4, 철거2조 음향신호기 신설 4대
안전표지		㈜동림티엔에스		안전표지 신설1, 이설3매

Ⅲ		감리사 실정보고 내용

보고내용

구 분	변경 전	변경 후	변경사유
신호	P7 부착대 11m	P7 부착대 9m	거리 충분 및 지형물(나무) 가림
	맨홀 신설 4	맨홀 신설 2	횡단 선로 맨홀, 제어기 맨홀 통합
	가로등 통합 2	가로등 통합 1	통합대상 1본 이나 설계 시 2본으로 설계
	전원 인입점 변경		아파트 입구 TR 신설

Ⅳ		검 토 결 과

감리사 실정보고에 대하여 승인하고자 함

Ⅴ		행 정 사 항

경미한 설계변경으로 감리사로만 승인 통보

붙임 1. 실정보고서 1부.

2. 설계변경내역서 및 설게변경도면 1부.  끝.