문서번호	한양도성도감-7506
결재일자	2020.7.22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
★주무관	도성보존팀장	한양도성도감과장
구선이	곽동진	07/22 안중호
협 조

「한양도성 숙정문 주변시설 및 암문 보수 정비공사」시행계획

2020. 7.

문 화 본 부

한양도성도감

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□	문화재청 국고보조금
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

「한양도성 숙정문 주변시설 및 암문 보수 정비공사」시행 계획

한양도성 숙정문 주변시설 및 암문 보수 정비를 위한 설계를 완료하고 아래와 같이 보수공사를 시행하고자 함

Ⅰ		공사개요

○ 공 사 명 : 한양도성 숙정문 주변시설 및 암문 보수정비 공사

○ 공사내용 및 규모

① 한양도성 숙정문 주변시설 보수 정비 공사(위치 : 종로구 청운동 산2-1)

- 계단 내 나무뿌리 제거 및 계단석 정비, 우측 문루 여장 파손된 전벽돌 교체 보수, 좌측 협문 부식 부재 교체 보수

② 낙산구간 이화마을 암문 바닥 정비(위치 : 종로구 창신동 615-199)

- 이화마을 암문 입구 바닥 콘크리트 제거 및 바닥면 포장 정비, 계단설치

※「한양도성 숙정문 주변시설 및 성벽 보수정비 시행계획」(한양도성도감-1193(2020.2.3.)호)의 사업내용 중 ③, ④번 정비공사(한양도성 성벽 보수정비 공사)는 공종별 분류하여 본공사와 별도 발주

○ 총공사비 :******************************************

○ 공사기간 : 착수일로부터 4개월

Ⅱ		추진경위

○ ‘20. 02. 03. : 한양도성 숙정문 주변시설 및 성벽 보수 정비공사 추진계획

(한양도성도감-1193호)

○ ‘20. 03. 06. : 설계용역 착수

○ ‘20. 03. 12. : 대공방어협조구역내 문화재보수공사 협의 완료

(협의결과:협의사항 아님/수도방위사령부-680호) ※ 붙임참조

○ ‘20. 05. 28. : 문화재청 설계승인(조건부 승인, 문화재청 수리기술과-2373호) ※ 붙임참조

○ ‘20. 05. 29. : 설계용역 준공

Ⅲ		공사 발주 계획

○ 입찰방법: 제한경쟁입찰

- 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」시행령제20조,제21조, 같은 법 시행규칙 제24조 내지 제26조

○ 입찰참가자격

- 지역제한 : 입찰공고일 전일부터 입찰일까지(낙찰자는 계약체결일까지) 주된 영업소가 서울특별시에 소재하여야 한다.

- 면허종류 :「문화재수리 등에 관한 법률」제14조 규정에 의한 “문화재수리업” 중 “종합문화재수리업(보수단청업)”으로 등록된  업체

○ 현장 설명 : 미 실시

※「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제15조 제3항

○ 하자보수 담보책임

-「문화재수리 등에 관한 법률 시행령」제19조 별표 9(문화재 수리의 종류별   하자담보 책임기간)에 의함

○ 예산과목

- 문화본부 한양도성도감, 한양도성 보존·관리·활용, 한양도성 보존‧정비, 한양도성 보수‧정비, 시설비(401-01)

Ⅳ		향후계획

○ 2020. 07. : 공사 발주 및 계약의뢰

○ 2020. 08. : 공사 계약 및 착수

○ 2020. 11. : 공사 준공(예정)

붙임  1. 사업계획 방침서 1부

2. 설계도서(내역서, 설계설명서, 설계도면 등) 1부

3. 문화재청 설계승인서 및 협의 문서 각 1부.  끝.