코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	영등포구청장(일자리경제과장)
(경유)
제목	2020년 노후전선 정비사업 사업계획 변경 승인 안내(영등포구)

1. 관련근거

가. 영등포구 일자리경제과-38691호(2020.7.14.) 「2020년 노후전선 정비사업 사업 변경 요청」

나. 서울지방중소벤처기업청 소상공인과-711호(2020.7.21.) 「2020년 노후전선 정비사업 사업계획 변경 승인 안내(영등포구 ****)」

2. 2020년 노후전선 정비사업 1차 선정시장인 영등포구 영신상가의 사업계획변경 요청 건에 대하여 다음과 같이 승인되었음을 알려드리니 사업 추진에 차질이 없도록 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 사업변경 승인내용

(단위:천원)

구분	당초					변경
사업비	계	국비 (50%)	지방비(30%)		민간 (20%)	변경 없음
			시비(9%)	구비(21%)
	44,155	22,078	3,974	9,272	8,831
사업기간	'20. 1. ∼ 6.					'20. 7. ∼ 12.
사업내용	- 분전반 교체(4개소) 및 차단기 설치 - LED 조명등(8개소) 및 노후전선 교체					- 분전반 교체(12개소) 및 차단기 설치 - 3개소 배선기구 교체 (비규격전선 → 규격전선)

붙임  1. 서울중기청 사업계획변경 승인 공문 1부.

2. 변경사업계획서 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	안승현		시장현대화팀장	이준학		소상공인정책담당관	07/22 강석
협조자
시행	소상공인정책담당관-12397	(		)	접수		(		)
우	04514	서울특별시 중구 서소문로 124 시티스퀘어 16층	/
전화	02-2133-5192	/전송	02-2133-0714	/	seunga0322@seoul.go.kr	/	부분공개(5)