문서번호	시설보수과-5717
결재일자	2020.7.17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	북부도로사업소장
송준행		오재섭	07/17 고영준
협조

『청계천복개(좌안)정밀안전진단용역』

설계변경 및 준공기한 연기 검토 보고

2020. 7.

북부도로사업소

(시설보수과)

『청계천복개(좌안)구조물 정밀안전진단용역』

설계변경 및 준공기한 연기 검토 보고

『청계천복개(좌안)구조물 정밀안전진단용역』관련하여, 내진성능평가 및 부착력시험 등 추가과업에 따른 설계변경 및 준공기한을 연기코자 보고 드림

관련근거

○ 용역 실정보고 검토결과 보고(시설보수과-4778호, 2020.6.12.)

○ 내진성능평가 및 FRP부착력시험 계획 검토 보고(시설보수과-5301호, 2020.7.1.)

용역개요

○ 용 역 명 : 청계천복개(좌안)구조물 정밀안전진단용역

○ 규    모 : 청계천복개(좌안)구조물(B=2.8~16.9m, L=4,943m)

○ 용역기간 : 2020.3.16. ∼ 2020.10.11.

○ 용 역 비 : 329,550천원

○ 용 역 사 : ㈜삼림엔지니어링, ㈜한국건설방재연구원

보고내용

○ 설계변경 및 준공기한 연기 사유

- 내진성능평가(2개소), FRP부착력 시험(20개소) 추가과업 실시

○ 설계변경 금액

- 당초 : 금329,550,000원 → 변경 : 금351,573,000원 (붙임2 참조)

- 총377,826,000원으로 용역비를 22,023,000원 증액하여 변경 계약하고, 용역비 증가분은 낙찰차액 활용하여 예산 마련

(단위 : 천원)

구 분	발주금액 (①)	계약금액 (②)	낙찰차액 (①-②)	소요예산	집행잔액 (예정)
계	377,826	329,550	48,276	22,023	26,253

※ 예산과목 : 도로시설과, 도로시설관리, 도로시설물 운영, 시설물 안전점검 및 진단, 시설비 및 부대비, 시설비.

○ 준공기한 연기

- 내진성능평가 및 부착력 시험 추가과업 지시로 인한 용역기한 연장 요청

- 준공기한 연기 일수 산출 : 30일(추가과업 시험 및 보고서 작성 등)

- 용역 준공기한 연기 요청일(30일)

당 초 : 2020. 3. 16. ~ 2020. 10. 11.

변 경 : 2020. 3. 16. ~ 2020. 11. 10.

- 지체상금 부과 여부 : 미부과(※귀책사유-서울시)

조치계획

○ 상기 보고내용과 같이, 설계변경 및 준공기한을 연기하여 용역 관리에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 1. 추가과업 검토보고 관련 서류 1부.

2. 설계변경 관련 서류(설계내역서, 합의각서) 일체 1부.

3. 준공기한 연기 의뢰서 1부.  끝.