투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	교통안전시설물(신호, 표지) 원인자부담공사 공사기간 연장승인 통보(여의도 파크원 복합시설)

1. 귀 기관(사)의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 과련근거

가. 교통관리과-4109(2019.02.27.)호 및 8785(2019.04.12.)호

나. Y22-2020-07-16-01(2020.07.16.)호

다. 대영전기감 GE20C-07-18호(2020.07.20.)호

3. 위 호와 관련하여 아래와 같이 공사기간 연장 승인함을 통보합니다.

가. 공 사 명 : 여의도 파크원 복합개발사업 교통안전시설물 설치공사

나. 공사장소 : 영등포구 여의대로 108 일대

다. 공사내용 : 교통안전시설(신호/표지) 개선 설치

라. 원 인 자 : 와이이십이프로젝트금융투자(주)

마. 연장사유 : 음향신호기 기능검사 및 도로포장 공정 일정 지연

바. 공사기간 연장승인 내용

구 분	승 인 전	승 인 후	비 고
공사기간	2019.08.08. ~ 2020.07.20.	2019.08.05. ~ 2020.09.30.	70일 증

붙임 : 감리사 검토의견서 1부.  끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
수신자	와이이십이프로젝트금융투자(주) 대표,대영유비텍(주) 대표,서울특별시지방경찰청장(교통관리과장),서울영등포경찰서장(교통과장),서울특별시장(교통운영과장),영등포구청장(교통행정과장)
주무관	이성도		기전과장	전결 07/20 서승완
협조자
시행	기전과-6632	(		)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237(마곡동67-1)	/
전화	02-2657-7963	/전송	02-2657-7939	/	lsd2000@seoul.go.kr	/	대시민공개