문서번호	건축부-12193
결재일자	2020.7.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		건축관리과장	건축부장
서경식		조승제	07/20 진경은
협조

『스페이스 살림 조성공사』

건설폐기물 처리비 반영 및 용역 시행계획 보고

2020. 7.

도시기반시설본부

(건 축 부)

『스페이스 살림 조성공사』

건설폐기물 처리비 반영 및 용역 시행계획 보고

「스페이스 살림 조성공사」공사 중 발생된 건설폐기물(공사 전 철거된 사업부지내 담장, 가설건축물 및 가설울타리 기초)의 처리를 위해 시공사에서 제출한 실정보고에 대하여 건설사업관리단의 적정성 검토 결과가 제출되어, 이에 대해 검토보고 함

※ *****************************************

************************************************

□ 사업개요

○ 위    치 : 서울시 동작구 대방동 340-3 외 3필지

○ 규    모 : 지하2층, 지상7층, 연면적 17,957㎡

○ 공사기간 : 2017.12.26. ~ 2020.09.25.

○ 시 공 사 : (주)호반건설 외 2개사

○ 감 리 자 : (주)희림종합건축사사무소 외 1개사

○ 건축공사비(도급액) : *********

○ 공 정 율 : 88%

□ 실정보고 내용

○ 보고 현황(시공사→건설사업관리단→우리본부)

-「건설폐기물 처리용역 분리발주 실정보고 적정성 검토보고」HTSC 2007-32호(2020. 7. 14.)

○ 관련 근거

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제75조

(그 밖에 계약내용 변경으로 인한 계약금액의 조정)

- 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제97조(설계변경 관리)

- 공사계약 일반조건 제19조 공사설계의 변경(설계변경등)

- 공사계약 일반조건 제20조 계약금액의 조정(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)

- 건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률 제15조 및 시행령 제11조

- 건설폐기물의 처리 등에 관한 업무처리지침(환경부예규 제629호, ‘18.1.16.)

- 사토 및 폐기물 운반관리 시스템 도입 방침(도기본 토목부-3080호, ‘19.2.26)

- 국가, 지자체, 투자·출연기관이 발주하는 건설공사 중 ‘건설폐기물 발생량이 100톤 이상인 건설공사’는 반드시 해당 건설공사와 분리발주토록 규정됨

○ 실정보고 사유

- *************************************

- ************************

□ 계약변경 내용(도급공사)

○ 공사비 검토******************

품 명	규 격	단위	수량	공사비	비 고
*********	*********	**	**	*********	*******
******	*******	*	**	*******	*********
*********				*********
*********				*******
합 계				*********

○ 적용단가 검토

- ************************

- ******************************************

□ 건설폐기물 처리용역 발주계획

○ 폐기물 처리 물량**********

구 분	폐기물 발생 사유	단위	수량	비 고
******* *******	********	*	*****
	************	*	****
	************	*	*****
************			******

○ **********

○ 수의계약 사유

- *******************************************************************************

○ 관련근거

-「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」제9조 및 시행령 제25조제1항제5호 나목 (추정가격 2천만원 이하인 물품의 제조․구매계약 또는 용역계약)

○ 보유면허

- 폐기물관리법 제25조, 건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 제21조 및 건설폐기물 처리등에 관한 업무처리지침(환경부예규 제629호, 2018.1.16.)에 따른 건설폐기물 수집․운반업과 건설폐기물 중간처리업 허가를 모두 득한 업체

○ 공동계약: 분담이행방식

- 자격 보완을 위하여 건설폐기물 수집․운반업 허가만 득한 업체는 서울특별시, 경기도, 인천지역의 중간처리업체와 공동도급(분담이행방식)이 가능하며, 이 경우 대표자는 서울특별시에 소재한 업체이어야 함.

*****************************************

○ 예산 관련

- ************************************************

- 예산과목 : 양성평등 및 여성복지 증진, 여성경제력 강화, 스페이스 살림 건립추진시설비 및 부대비, 시설비

□ 건설사업관리단 검토의견

○ *******************************************************************

□ 처리 의견

○ ****************************************하고,

○ **************************하여 공사시행에 만전을 기하고자 함.

붙 임 : 건설사업관리단 실정보고 검토의견서 1부.  끝.