투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부공원녹지사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	변경계약 체결 보고(청사 팬코일유닛 교체 공사)

1. 시설과-1294(2020. 7. 14.)호와 관련됩니다.

2. 위 호와 관련하여 다음과 같이 변경계약이 체결되었음을 보고합니다.

가. 건명: 서부공원녹지사업소 청사 팬코일유닛 교체 공사

나. 계약자: ㈜대한진호산업 대표 최창호

다. 계약금액: 금13,070,000원(금일천삼백칠만원)

※ 원인행위No: 226

라. 계약기간: 2020. 6. 26.~ 2019. 7. 20.

마. 변경내용: 계약금액, 준공기한 변경

구 분		공 사 비			비 고
		당 초	변 경	증 감
도 급 액	공급가액	11881819	12580000	698,181
	부가세	1188181	1258000	69,819
	도급공사비	13,070,000	13,838,000	768,000

- 준공기한 2020. 7. 20. ⟶ 2020. 7. 27.로 변경

붙임  공사계약서류 각 1부.  끝.

★주무관	김호영		재무팀장	代김호영		공원운영과장	최석환		서부공원녹지사업소장	07/20 남길순
협조자
시행	공원운영과-9354	(		)	접수		(		)
우	03901	서울특별시 마포구 월드컵로 243-60	/	http://worldcuppark.seoul.go.kr/
전화	300-5512	/전송	300-5527	/	sky500611@seoul.go.kr	/	부분공개(6)