“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강남수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	준공기한 연기(1차) 계약 의뢰

우리사업소에서 시행중인「역삼동 735번지 외 11개소**********」에 대하여  준공기한(1차)을 아래와 같이 변경계약 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명: 역삼동 735번지 외 11개소 배급수관 정비공사

나. 계약금액: **************

다. 계약기간

1) 당 초: *************************

2) 변 경: *************************

라. 연기사유: 도로점용(굴착‧복구) 허가 지연 및 민원에 따른 절대공기 부족으로 인한 공기연장

마. 지체상금 부과여부: 미부과

바. 선금지급 여부: 미지급

붙임 : 1) 준공기한 연기결정 품의서 및 관련서류

2) 합의서 1부.  끝.

	급수운영과장
주무관	차승현		급수관리팀장	전동근		급수운영과장	07/21 최춘근
협조자
시행	급수운영과-11600	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-4852	/전송	02-3146-4889	/	201107260@seoul.go.kr	/	부분공개(7)