문서번호	공공재생과-7663
결재일자	2020.7.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	공공재생사업팀장	공공재생과장
최용민	윤재원	07/21 이동일

용역 준공기한 연기보고(미아동 구릉지 일대 이동편의 개선사업 기본 및 실시설계용역)

- 미아동 구릉지 일대 이동편의 개선사업 -

기본 및 실시설계용역 준공기한 연기

2020. 7.

도시재생실

공공재생과

- 미아동 구릉지 일대 이동편의 개선사업 -

기본 및 실시설계용역 준공기한 연기

대중교통 소외지역 교통복지 개선을 위한 ‘미아동 구릉지 일대 이동편의 개선사업 사업추진 중 수차례 주민설명회를 통한 검토 의견 반영 등 절대 공기 부족하여 준공기한 연장코자함.

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 미아동 구릉지 일대 이동편의 개선사업

○ 용역금액 : 222,999,000원(부가세 포함)

○ 용역업체 : ㈜삼우씨엠건축사사무소 대표자 정승진

○ 용역기간 : 2019.08.07. ~2020.10.30.(91일)

□ 검토 내용 및 처리의견

○ 준공 기한 연장

당 초	변 경	비고(증·감)
‘19.08.07. ~ ’20.07.31.	‘19.08.07. ~ ’20.10.30.	계약기간 91일 연장 계약금액 변경 없음

○ 연장 사유

- 기본설계 보완(주민의견 반영)에 따른 절대공기 부족 기간연장 필요

○ 처리의견 : 공사기간 조정·변경 계약처리

○ 연기사유 귀책소재 : 공공재생과

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임  용역계약서 1부.  끝.