문서번호	설비부-10796
결재일자	2020.7.23.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
정찬교		代유영선	07/23 이달영
협 조

「창덕궁앞 도성한복판 주요가로 전기공사」

준공기한 연기 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 07.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『창덕궁앞도성한복판 주요가로 전기공사』

준공기한 연기 검토보고

『창덕궁앞 도성한복판 주요가로 전기공사』와 관련한 건설사업관리자의

준공기한 연기 요청에 대하여 검토하고 보고 드림.

□ 연기사유 : 선행공정(토목) 공사기간 연장

□ 준공기한(총차기준) : `20.8.31→`20.9.30(증 30일)

Ⅰ		사업개요

□ 공사명 : 창덕궁앞 도성한복판 주요가로 전기공사

□ 공사기간 : ‘19.01.11.~’20.08.31.

□ 공사비(전기) :**************

□ 감리사 : ㈜경동엔지니어링 외 1개사

□ 시공사 : **********

□ 공정율(전기) : 90 %

Ⅱ		관련근거

□ 창덕궁감 2020-198(`20.07.23.) : 준공기한 연기 요청

Ⅲ		준공기한 연기내용

□ 연기사유 : 선행공정(토목)의 준공기한이 `20.09.30으로 연기   됨에 따라 후속공정인 전기공사 기간 조정 필요

□ 연기내용

차수	계약금액	준공기한
		당초	변경	비고
총차	**************	********	********	증)30일
1차	************	********	********	증)61일
2차	************	********	********	증)30일

□ 귀책소재 : 서울특별시 도시기반시설본부

Ⅳ		보고자 의견

□ 선행공정 공사기간 연장에 따라 후속공정인 전기공사의 준공기한 연기하는 것이 적정하므로 위 내용과 같이 계약부서에 준공기한 연기 의뢰하고자 함.

첨 부 : 감리단 공문 1부.  끝.