코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	변경계약 의뢰(준공기한 연기)

우리과에서 시행 중인 아래 용역에 대하여 다음과 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여    주시기 바랍니다.

1. 용 역 명 : 2021년 서울형 리앤업사이클플라자 조성 타당성 연구 용역

****************************

3. 준공기한 연기계획

구 분	당 초	변 경	비 고
준공 기한	2020년 07월 24일	2020년 08월 07일

4. 귀책사유 : 서울특별시

5. 연기사유 : 리앤업사이클플라자 연구용역 대상 4개 자치구(*******************와의 건물 복합화 및 건축규모 등 추가적인 업무협의를 위하여 과업기간 연장 필요

붙임  1. 준공기한 연기의뢰서 1부.

2. 준공기한 연기방침서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	자원순환과장
실무사무관	김영진		재활용사업팀장	김재권		자원순환과장	07/23 정미선
협조자
시행	자원순환과-12455	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3694	/전송	02-2133-1026	/	youngjin@seoul.go.kr	/	부분공개(5)