문서번호	도로보수과-6623
결재일자	2020.7.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	도로보수과장	북부도로사업소장
황태선	이화신	07/24 고영준

『2020년 도로 및 교통부속물유지보수공사(연간단가)』

작 업 지 시 (3차) 완 료 보 고

2020. 7.

북부도로사업소

(도로보수과)

『2020년 도로및교통부속물 유지보수공사(연간단가)』

작업지시(3차) 완료 보고

우리사업소에서 시행중인 「2020년 도로 및 교통부속물 유지보수공사(연간단가)」와 관련 3차 작업지시 완료에 따른 검토 보고 임.

▢ 사업개요

∘ 공 사 명: 2020년 도로및교통부속물 유지보수공사(연간단가)

∘ 공사개요

- 도로및교통부속물 세척 : 11,000㎡

- 과속방지턱 도색       : 1000㎡

- 도로표지병 설치       : 1,260개

∘ 총공사비: *********

- 도급비: *********

- 관급비: ********

- 이전비: ********

∘ 도 급 자: **************

▢ 3차 작업완료 내용

∘ 작업기간: 2020. 06. 03. ~ 07. 24.

∘ 작업구간: 해등로, 한글비석로, 아리랑로 3개 노선

공 종	정비물량(㎡)		증·감
	작업지시	작업완료
무단횡단금지시설 설치	745	720	감) 25
무단횡단금지시설 철거	745	720	감) 25
시선유도봉 설치	37	35	감) 2

※ 2020년 상반기 노후포장 도로정비공사 구간 교통부속물 원상복구

∘ 세부작업내용

연번	노선	위치	공 종	정비물량(EA)		증·감
				당초	변경
1	해등로	도봉보건소교차로~ 문이교	무단횡단금지시설 설치	246	246
			무단횡단금지시설 철거	246	246
			시선유도봉 설치	30	30
2	한글비석로	상계역교차로~ 보람아파트교차로	무단횡단금지시설 설치	238	238
			무단횡단금지시설 철거	238	238
3	아리랑로	성신여대입구역교차로~ 아리랑로82	무단횡단금지시설 설치	261	236	감) 25
			무단횡단금지시설 철거	261	236	감) 25
			시선유도봉 설치	7	5	감) 2
계				1,527	1,475	감) 52

☞ 관급자재(교통부속물 유지보수 자재 구매) : ********

∘ 예산집행현황

(단위: 천원)

구분	계약금액	전회 작업완료	3차 작업완료	잔 액	비 고
도급비	351,520	219,120	35,420	96,980
관급비	72,930	-	28,181	44,749
이전비	24,000	3,344	-	20,656
합계	448,450	222,464	63,601	162,385

▢ 조치계획

∘ 『2020년 도로및교통부속물 유지보수공사(연간단가)』에 시공물량을 반영하여 실정산하고자 함.

붙임  1. 공사완료사진(별도보고) 1부.

2. 작업완료보고서 1부.

3. 작업완료내역서 1부.  끝.