문서번호	기전과-6806
결재일자	2020.7.24.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
이성도		07/24 서승완
협조

『교통안전시설 원인자부담공사(신정1-1 재정비촉진사업)』

감리사 실정보고에 대한 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 7.

강서도로사업소

(기전과)

『교통안전시설 원인자부담공사(신정1-1 재정비촉진사업)』

감리사 실정보고에 대한 검토보고

우리사업소에서 승인한 교통안전시설(신호) 원인자부담공사와 관련    감리사로부터 현장 실정보고서가 제출되었기에 검토보고 드림.

Ⅰ		관 련 근 거

교통관리과-31936(2019.12.20.)호

1-1지구 주택재개발 제2020-377(2020.07.14.)호

대영전기감 GE 20C-07-12(2020.07.14.)호

Ⅱ		공 사 개 요

공 사 명 : 신정1 재정비촉진구역 1-1지구 재정비촉진사업 중 교통안전시설물 설치공사

원 인 자 : 신정1재정비촉진구역1-1지구재정비촉진사업조합

공사기간 : 2020.03.16. ~ 2020. 06. 30.

공사장소 : 양천구 신정1-1 주택재개발지구

공사개요 : 교통신호기 신·이설 및 교통안전표지 개선

관련업체 및 주요설치 내용

구 분	설 계	감 리	시공업체	승인주요내용
신호기	㈜동림티엔에스	대영유비텍㈜	㈜다옴건설	제어기 신설 5대 지주 신설26, 이설3, 철거4본 신호등 신설40, 이설10, 철거3조 음향신호기 신설24, 이설3대
안전표지		㈜동림티엔에스		안전표지 신설 20매

Ⅲ		감리사 실정보고 내용

보고내용

1. 설계변경내용

교차로명	변경 전	변경 후	변경사유
A신설교차로 (두산위브101동앞)	보행지주 1본	보행지주 3본	지장물 및 횡단보도 전폭 내 지주 위치
C신설교차로 (신도1차103동앞)	후방신호 4본	후방신호 3본 전후방신호 1본	국민신문고 민원 (비대칭 교차로로 후방신호가 보이지 않음)
D신설교차로 (신정유타운204동앞)	보행지주 1본	보행지주 2본	보행지주 1본 설계 누락
신월주유소앞 (청기와호텔)	후방신호 4본	후방신호 3본 전후방신호 1본	현장 민원 (신호대기시 가공전선로에 가려 후방신호 보이지 않음)

2. 공사기간 2차 연장

- 연장사유 : 민원 해소 및 현장여건에 따른 토목공정 변경에 따른 공기 부족

구 분	당 초	변 경	비 고
공사기간	2020.03.16. ∼ 2020.06.30.	2020.03.16. ∼ 2020.08.31	62일 증

- 연장내용

Ⅳ		검 토 결 과

감리사 실정보고에 대하여 승인하고자 함

Ⅴ		행 정 사 항

원인자 및 유관기관(업체) 승인통보

붙임 1. 공사기간 연장요청 및 실정보고서 1부.

2. 설계변경내역서 1부.

3. 설계도면(변경전후) 1부.  끝.