문서번호	시설관리과-11021
결재일자	2020.7.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설안전팀장	시설관리과장	강동수도사업소장
박철호	김주경	김종원	07/24 안병희
협 조
	급수운영과장		한희선
	주무관		제영도

2021년 길동배수지 외 2개소 정밀안전진단 추진계획

2020. 7

강동수도사업소

2021년 길동배수지 외 2개소

정밀안전진단 추진계획

『시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법』에 의거 2021년 정밀안전진단용역 추진계획을 보고 드림

※ 관련근거

① 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제12조

② 본부 시설과-4313(2020.7.22.) : 2021년 기술용역타당성 심사요청 안내

1		대상 시설물

❍ 3개소 : 급수운영과(2개소), 시설관리과(1개소)

구 분	시설물명	시설개요	준공년도	내진성능평가	비 고
정밀안전진단 (5년에 1회 이상)	길동배수지	60,000㎥	2006	대 상	시설관리과
	오금배수지	8,000㎥	1987	대 상	급수운영과
	오금가압장	75Hpx4대	1987	대 상

※ 상수도시설물 점검수준 및 유지관리 강화를 위해 4년주기로 안전진단 시행

❍ 추진목적

- 시설물의 현장조사 및 각종 시험에 의해 물리적ㆍ기능적 결함과 내재되어 있는 위험요인 발견 후 안전성 확인하고, 보수ㆍ보강 및 조치방안을 제시

- 보수ㆍ보강 등 시설개량 추진으로 시설물의 안전을 확보하는데 있음

2		추진 계획

❍ 추진기간 : 2020. 8. ~ 2021. 12.

❍ 추진일정

- 2020.  8. : 자료조사 및 설계서 작성(과별)

- 2020.  9. : 기술용역 타당성 심사 요청(본청 기술심사담당관)

- 2020. 10. : 21년도 사업계획서 작성 및 예산요청(본부)

- 2021.  1. : 사업예산 배정

- 2021.  2. : 설계심사 결과에 의거 과별 용역발주

- 2021.  3. : 사업 착수(2021년 상반기 배수지 청소일정과 병행 시행)

- 2021. 12. : 용역 준공(최종 성과물 제출)

❍ 사업비

- 소요예산 : 250백만원 (타당성심사 전)

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선교체유지비

(배수지 등 정밀안전진단·점검 및 시설정비)

❍ 용역 방법

- 정밀안전진단 전문용역업체 계약 시행

❍ 점검 내용

- 사전조사를 실시하여 도면작성 및 계획 수립

- 정밀안전진단에 필요한 설계도면ㆍ시방서ㆍ사용재료 내역 등 시공관련

자료의 수집 및 현장조사를 통한 사전검사

- 육안검사 및 진단측정 장비를 사용하여 측정 및 검사

- 시설물의 구조적, 기능적 상태평가 및 안전성평가와 이에 따른 종합평가

- 점검 결과 평가에 따른 보수ㆍ보강 방법 제출

- 보수ㆍ보강을 위한 방법 및 설계도서 제출

3		사업 효과

❍ 시설물의 안정성 확보 및 재난사고 예방

❍ 점검결과에 따라 보수ㆍ보강 실시

4		행정 사항

❍ 과별로 기술용역 타당성 심사 요청 : 본청 기술심사담당관

❍ 타당성 심사 결과 조치 : 본부 시설과에 2020. 8. 12.(수).까지 결과 보고

❍ 2021년 조치사항

- 서울시 기술용역 관리시스템 등록(발주전 설계내역서 및 과업지시서)

- 용역 계약의뢰(계약부서 강동 행정지원과)

- 시설물 정보관리 종합시스템(FMS) 입력(성과품 등록)

붙임 : 2021년 사업소별 안전진단 및 점검대상 관련공문 1부.  끝.