투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	총무부장
(경유)
제 목	준공기한 연기 의뢰(창덕궁앞 도성한복판 주요가로 전기공사)

우리 본부에서 진행중인 「창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 전기공사」에 대하여 준공기한 연기 요청 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 계약현황

- 공사명 : 창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 전기공사

- 계약금액 : ***************(총차기준)

- 공사기간 : `19.1.11~`20.8.31(총차기준)

- 계약자 : ***********

나. 변경계약 내용

차수	계약금액		공사기간
	당 초	변 경	당 초	변 경
총차	**************	변경없음	`19.1.11~`20.8.31	`19.1.11~`20.9.30
1차	************	변경없음	`19.1.11~`20.7.31	`19.1.11~`20.9.30
2차	************	변경없음	`19.11.22~`20.8.31	`19.11.22~`20.9.30

- 준공기한 연기사유 : 선행공사 준공기한 연기에 따른 순연

붙임 : 1)준공기한 연기 검토보고서 1부.

2)준공기한 연기 합의서 1부. 끝.

	설비부장
주무관	정찬교		녹색성장과장	代유영선		설비부장	07/24 이달영
협조자
시행	설비부-10826	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8640	/전송	02-3708-8659	/	jamjaco@seoul.go.kr	/	부분공개(7)