문서번호	정수시설과-7765
결재일자	2020.7.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장	암사아리수정수센터소장
조광호		전훈	07/24 조성태
협 조
	주무관			김응균

「암사 제2취수장 이동밴드스크린」 제작구매 설치 완료보고

2020. 7.

암사아리수정수센터

「암사 제2취수장 이동밴드스크린」

제작구매 설치 완료보고

금회 ⌜암사 제2취수장 이동밴드스크린 제작구매설치⌟와 관련하여 물품설치 및 시운전을 완료하였기에 아래와 같이 보고드림.

□ 사업개요

❍ 건    명 : 암사 제2취수장 이동밴드스크린 제작구매설치

◆ 대상지 현황 - 위 치 : 암사아리수정수센터 제2취수장 흡수정 - 규 격 : 이동밴드스크린 W2.4m×L18.6m - 주요기기 : 바스켓(스크린), 살수장치, 구동부 등 - 수 량 : 4대

❍ 사업내용 : 이동밴드스크린(W2.4×L18.6m) 2대 교체

❍ 사업목적 : 20년 이상 장기간 사용으로 노후된 스크린을 적기에 교체하여 스크린 이탈에 따른 사고발생 방지 및 취수펌프의 보호

❍ 계약금액 : *************

❍ 계약기간 : ’20.2.21. ~ ’20.7.19.

❍ 계약업체 : ****************

□ 추진경위

❍ ‘20.02.21. 계약체결

❍ ‘20.03.26. 승인도서 검토완료 및 물품제작

❍ ‘20.06.10. 공장검수 실시

- 가조립(바스켓 20% 조립) 무부하 시운전

- 재질(Mill Sheet 확인) 및 치수검사(실측 확인) 등

❍ ‘20.07.09. 현장설치 및 부하 시운전 실시

❍ ‘20.07.17. 변경계약체결(미집행 제경비 정산) 및 납품검수 요청

□ 주요 공정사진

************************************************************************************************************************************

□ 향후계획

❍ 상과와 같이 정상가동되어 납품검수코자 함.

❍ 예비품 및 하자관리 철저 (※ 하자담보책임기간 : 납품검사일로부터 3년)

❍ *******************************

붙임  1) 준공도서(준공도면, 검사성적서, 사진대지 등) 1부

2) 예비품 및 유지관리용 공구현황 1부.  끝.