문서번호	시설보수과-5816
결재일자	2020.7.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
윤동원		류태용	07/24 박문희
협조
	관리단속과장		박종윤

개화지하차도외 5개소 차량방호울타리 교체공사

현 장  실 정 보 고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 07.

개화지하차도외 5개소 차량방호울타리 교체공사

현장 실정보고

2017년 안전감사당시 비규격품 지적사항에 대한 조치방안으로 우선순위별 시행중에 있는 『개화지하차도외 5개소 차량방호울타리 교체공사』에 대한 현장실정 보고임

Ⅰ		공사개요

❍ 공 사 명 : 개화지하차도외 5개소 차량방호울타리 교체공사

❍ 공사규모

- 차량방호울타리 교체 : 2,510m

- 고재처리 17,854㎏, 콘크리트단면보수 68㎡, 기타부대공 1식

❍ 공사기간 : 2020. 5. 27 ~ 9. 23

❍ 도 급 자 : ㈜휴먼하우징텍 대표 권오연

❍ 관급자재(현장설치도) : 에스더블류도로안전(주) 대표 신희수

❍ 예산현황 : 700,930천원

(도급비 89,930천원, 관급비 611,000천원)

	< 예산현황 >
▷발주금액: 700,930천원(도급비 89,930, 관급비 611,000) ▷계약금액: 659,149천원(도급비 79,023, 관급비 580,125) ▷변경금액: 792,000천원(도급비 98,000, 관급비 694,000) ※ 낙찰차액 : 41,780천원 ※ 개화지하차도외 1개소 보수공사 집행잔액(138,680천원) 중 일부반영: 98,816천원

Ⅱ		추진현황

❍ 2020.05.27 : 공사착공

❍ 2020.07월 현재 : 난간제작 및 교체작업 시행중(공종율 70%)

Ⅲ		보고내용

❍ 2020년 방호울타리 예산반영 현황

연번	시 설 명	안전등급	총연장 (m)	예산안(천원)	예산반영(천원)
	합 계		2,294	820,659	704,192천원
1	개화지하차도	SB5등급	736	209,961	도로시설과 533,792천원
2	노들길지하차도	SB5등급	936	266,292
3	서울교접속지하차도	SB4등급	68	14,145
4	신정교접속교	SB5등급	138	39,261	교량안전과 180,000천원
5	개봉철도고가	콘크리트방호벽	296	266,400
6	화곡고가	SB5등급	120	24,600

❍ 2020년 방호울타리 재정비 대상 선정(예산확보액 범위)

연번	시 설 명	안전등급	총연장 (m)	구매수량 (m)	비 고
1	개화지하차도	SB5등급	740	740
2	노들길지하차도	SB5등급	943	526	417m 미반영
3	서울교접속지하차도	SB4등급	72	69
4	구로지하차도	SB5등급	524	524
5	신정교접속교	SB5등급	136	136
6	화곡고가	SB5등급	172	172

※ 노들길지하차도는 총 943m이나 당초 예산범위내인 노량진방면 U-type구간(526m)까지만 반영

❍ 문제점

- 노들길지하차도의 차량방호울타리 정비대상은 총 943m이나 확보된 예산범위인 526m만 반영하고 417m에 대하여는 발주당시 제외됨

- 노들길지하차도 잔여물량(417m)에 대하여도 정비필요(감사 지적사항)

Ⅳ		검토의견 및 조치방안

❍ 차량방호울타리 교체공사는 2017년 안전감사당시 비규격품 지적사항에 대하여 안전등급기준에 적합한 제품으로 우선순위별로 재정비중에 있는 사업임

❍ 당초 노들길지하차도는 예산범위인 노량진방면 U-type구간만 정비하는 것으로 계획하였으나 전구간 정비 필요

※ 추가정비대상 : 연장 417m, 소요액 132백만원

(단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감	비 고
총 공 사 비	660,000	792,000	증) 132,000
도 급 비	79,000	98,000	증) 19,000
관 급 비	581,000	694,000	증) 113,000	현장설치도

❍ 추가정비대상에 소요되는 132백만원은 본공사 낙찰차액(41,780천원) 및 기 완료된 “개화지하차도외 1개소 보수공사”의 집행잔액(128,680천원)을 활용 조치코자 함

❍ 상기 내용에 대하여는 본공사의 연속성을 감안하여 변경 시행토록 하고 추후 설계변경시 정산 반영하고자 함

붙임 : 계략공사비 산출 내역서 1부.   끝.