문서번호	도시농업과-11389
결재일자	2020.7.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
★주무관	도시농업조성팀장	도시농업과장
강명희	김형금	07/24 김광덕

- 강북 도시농업체험장 조성공사 -

설계변경(정산) 검토보고

2020. 7.

경제정책실

(도시농업과)

- 강북 도시농업체험장 조성공사 -

설계변경(정산) 검토보고

「강북 도시농업체험장 조성공사」추진과 관련하여 시민 제안사항 등을 반영한 설계변경(정산)사항을 검토하고 아래와 같이 보고드림.

Ⅰ	공사개요

□ 건    명: 강북 도시농업체험장 조성공사

□ 기    간: 2020. 6. 15. ~ 7. 29.

□ 위    치: 강북구 수유동 599, 594-1번지

□ 계약금액: ***********

□ 계 약 자: ***********

Ⅱ	설계변경(정산) 내용 및 금액

□ 주요 변경 내용

공정	당 초	변 경	변경사유	비고
철거 공사	기존 휀스 철거	공정제외	강북구 산책로 공사 시 시행
시설물 공사	비닐하우스(학습장) 설치 및 경지 정리	공정추가	비닐하우스(학습장) 기반조성
우배수 공사	자연형 침사지·집배수용 침사지 등	공정추가	인접 주택 우수범람 예방
식재 공사	화목류 식재	공정제외	예산부족

※ 세부 변경 내역 : 붙임 참조

□ 변경 금액

구 분		금 액		증 감	비고
		당 초	변 경
총 공 사 비		53,500,000	54,890,000	1,540,000
도급비	공급가액	48,500,000	49,900,000	1,400,000
	부가가치세	4,850,000	4,990,000	140,000
	계	53,500,000	54,890,000	1,540,000

Ⅲ	처리계획

□ 위에서 검토한 바와 같이 본「강북 도시농업체험장 조성공사」에 대하여 설계변경을 시행하고자 함

붙임 : 설계변경내역서 1부.  끝.