문서번호	배수과-7009
결재일자	2020.7.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		배수과장	급수부장
박종혁		김원수	07/28 신용철
협조	주무관		김지환
	주무관		문정주

상수도사업본부 발족 30년!, 수돗물 통수 111년!, 믿음직한 아리수

대형 상수도 공사장 순회 점검 계획

2020. 7.

급  수  부

[배수과]

대형 상수도 공사장 순회 점검 계획

2020년 장기사용 송배수관 정비공사 및 무단수 급수체계 구축공사, 원인자 시행 대형 상수도관 이설공사 현장에 대하여 순회 점검을 실시하여 사업 추진에 철저를 기하고자 함.

Ⅰ		공사 현황

1. 2020년 장기사용 송배수관 정비공사

○ 정비목표 : 15㎞

○ 사 업 비 : 353억원

○ 공사건수 : 17건

○ 사업소별 현황

구분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동	본부
공사건수	17	2	2	2	2	2	3	2	2
정비계획(km)	15	1.0	1.2	2.3	1.4	2.7	2.4	2.1	1.9
사업비(억원)	35,383	3,600	2,173	4,300	2,105	5,053	5,950	5,790	5,300	1,112

※ 본부(시설부대비 0.3억, 대행사업비 10.82억원)

2. 2020년 무단수 급수체계 구축공사

○ 정비목표 : 관로부설 4.9㎞, 바이패스 1개소, 밸브설치 3개소

유량계 설치 25개소

○ 사 업 비 : 100.7억원

○ 공사건수 : 6건

○ 사업소별 현황

구분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동	본부
공사건수	6	-	-	2	2	1	1	-	-	-
정비계획(km)	4.9	-	-	1.3	2.0	0.4	1.2	-	-	-
사업비(억원)	100.7	-	-	18.7	27	6	15.5	-	-	33.5

※ 본부(시설부대비 및 배정잔액 6.34억, 대행사업비 5.9억원, 유량계 설치 21.3억원)

3. 원인자 이설공사 현황

○ 공사건수 : 5건

○ 수도 사업소별 담당 현황

연번	사업소	공사명	공사개요		발주처	공정률(%)	비고
			구경 (mm)	연장 (m)
1	남부	신림봉천 터널 도로건설공사 구간 중 지장 상수관로 이설공사	900~1500	1,150	도시기반 시설본부	80
2	강남	대모지하차도 설치공사 구간 중 지장 상수관로 이설공사	1800	1,200	도시기반 시설본부	70
3	강서	강서구청사거리~가양펌프장간 하수암거 정비공사(3단계) 구간 중 지장 상수관로 이설공사	700~1200	200	강서구청	90
4	강동	세종~포천(안성~구리)간 고속도로 건설공사(12공구) 중 지장 상수관로 이설공사	1800	1000 (500m×2열)	한국 도로 공사	5
5	강동	세종~포천(안성~구리)간 고속도로 건설공사(13공구) 중 지장 상수관로 이설공사	700	70	한국 도로 공사	5

Ⅱ		점검실시 개요

○ 점검대상 : 본부 산하 8개 수도사업소 28개 공사 현장

○ 점 검 반 : 2개조 조편성(3인 1조)

○ 점검일정 : 2020. 8. 4.~ 8. 27.(23일)

○ 점검방법 : 공사현장별 공사일정에 의하여 조별 공사현장 점검

○ 사업소별 점검일정

구 분	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
점검 일시	8. 4(화) ~ 8. 5(수)	8. 6(목) ~ 8. 7(금)	8. 10(월) ~ 8. 11(화)	8. 12(수) ~ 8. 13(목)	8. 18(화) ~ 8. 19(수)	8. 20(목) ~ 8. 21(금)	8. 24(월) ~ 8. 25(화)	8. 26(수) ~ 8. 27(목)

※ 본부 및 사업소 여건에 따라 점검 일정은 변경될 수 있음.

○ 주요점검내용

- 설계도면 심사 결과 반영 공사추진 여부

- 공사현장 점검

․ 현재 추진현황 및 공정점검(공정 부진현장 만회대책 수립여부)

․ 공사현장 자재관리 적정성 점검.

․ 교통안전대책 시행여부 및 작업자 안전관리실태 점검

․ 공사현장 주변 시민불편사항 발생 방지대책 수립 여부 등

- 원인자 이설공사 현장 이설승인조건 이행여부 등.

Ⅲ		행정사항

○ 수도사업소

- 점검일정에 맞추어 본부 점검자 현장 안내

- 당초 점검일정에 공사가 없을 경우 서울시설공단 감독자와 협의하여 향후 점검일정을 본부에 통보

- 공사관련 자료(설계도면,교통소통대책 도면 등)준비

○ 서울시설공단

- 공사감독자는 현장에서 본부 점검에 적극 협조

- 공사관련 자료(자재 수급내용,사급자재 현황, 작업자 교육일지 등) 준비

- 현장지적사항에 대한 조치결과를 보고

○ 기타사항

- 야간 현장 점검자는 시간외 근무명령에 의하여 초과근무 인정.

Ⅳ		향후계획

○ 지적사항 조치 및 애로사항 반영․개선하여 사업추진 철저.

붙임 : 1. 공사현장 점검표(양식) 1부.

2. 장기사용 송배수관 정비공사 현황 1부.

3. 무단수 급수체계 구축공사 현황 1부.  끝.