코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	추가 공사요청 및 우기대비 공사장 관리 철저(한양도성 유적전시관)

1. 귀사의 발전과 무사고를 기원드립니다.

2. 2020.7.23. 서울시 한양도성 자문위원회에 남산 회현자락 한양도성 유적전시관 조성공사 현황에 대하여 현장보고한 결과 관람객의 안전사고 예방을 위해 아래와 같이 안전시설물을 추가하여야 한다는 의견이 있어 알려드리니 추가 공사에 반영하여 2020.8.15.한 완료해 주시고 해당 공사전 감리자 경유하여 실정보고를 제출해 주시기 바랍니다.

《추가 공사내용》

당 초	변경(추가 공사)	비 고
안전난간 없음 안전목책 없음	보호각 후면 및 측면부 난간설치 보호각 전면부 목책설치	기존 난간과 같은 색상 및 규격 관람객 사고예방 및 접근 방지용

3. 아울러, 우기철을 대비하여 공사장의 피해발생, 토사유출, 수목 쓰러짐 및 지반침식 등이 발생하지 않도록 하고 새로 형성된 지반 안정화와 잔디 및 초화류 유지관리 등에 철저를 다해 주시기 바랍니다.

붙임: 안전사고 예방용 안전난간 등 설치구간 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	(주)금성종합건축사사무소 대표 이석범님(한양도성 유적전시관 조성공사 감리자-감리원이메일 발송),원택건설(주) 대표 오원진님(한양도성 유적전시관 조성공사 시공자- 현장관리인 이메일발송)
주무관	왕승찬		도성보존팀장	곽동진		한양도성도감과장	07/24 안중호
협조자
시행	한양도성도감-7587	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동) 서울시청 서소문 청사 1동 5층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-2671	/전송	02-2133-1063	/	vivawang@seoul.go.kr	/	대시민공개