투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완설계 건설사업(설계감리) 용역 준공기한 연기 요청

1. 토목부-14609호(2020.07.27.)와 관련입니다.

2. 우리 본부에서 시행중인『월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완설계 건설사업관리(설계감리)용역』에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역개요

1) 용 역 명 : 월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완설계 건설사업(설계감리)용역

2) 용 역 비 : 389,526,000원

3) 용역기간 : 2017. 8. 11. ~ 2020. 7. 31.

4) 계 약 자 : ㈜제일엔지니어링종합건축사사무소

나. 준공기한 연기 : 60일 연장 (당초 : 2020. 7. 31. → 변경 : 2020. 9. 29.)

다. 귀책소재, 지체상금 및 연기사유

1) 귀책소재 : 서울특별시

2) 지체상금 : 미부과

3) 연기사유 :「월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완설계」용역 준공기한 변경(2020. 7. 31. ⇒ 2020. 9. 29.)에 맞추어 건설사업관리용역 준공기한을 2020. 9. 29.까지 연기

라. 예산과목 : 도로건설, 간선도로망 확충(도시개발특별회계), 월드컵대교건설,

시설비및부대비, 감리비

붙임 : 1) 준공기한 연기 방침 1부.

2) 준공기한 연기 의뢰서 1부.

3) 준공기한 연기요청 공문 및 예정공정표 1부.

4) 합의각서 사본 1부. 끝.

	토목부장
주무관	김종혁		토목설계과장	김동현		토목부장	07/28 김용제
협조자
시행	토목부-14718	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 12층 서울시 도시기반시설본부 토목부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2591	/전송	02-3708-2599	/	mindle93@seoul.go.kr	/	부분공개(5 6)