투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	신림선 도시철도 민간투자사업 총사업비 관련 절차이행 요청 및 변경 승인시 통보 요청

1. 남서울2020-507호(2020. 6.26.) 및 도시철도계획부-3248호(2020. 4. 7.)와 관련입니다.

2. 남서울경전철(주)로부터 2020. 6. 26일자로 귀 부서에서 요청 받으신 철도종합시험운행 시행지침 개정에 따른 공기연장 및 총사업비 변경 승인 요청에 대하여 붙임2 관련 업무절차(도시철도 민자사업 자문단운영계획 ’18.4.19.)를 알려드리오니 담당 부서별(도시철도설비부, 도시철도사업부)로 자문회의 및 협의(협상) 실시 여부를 판단하시어 총사업비를 확정(변경승인)하고 그 결과를 사업시행자에게 통보하여 주시기 바라며,

3. 아울러, 사업시행자가 총사업비 변경 승인 사항을 종합 후 실시협약 반영 요구시 적정성, 조치방안 협의 등 반영 검토에 참고할 수 있도록 우리부서에도 결과를 알려주시기 바랍니다.

붙임 1. 공기연장 협의 검토계획 1부.

2. 도시철도민간투자사업 자문단운영 계획 및 총사업비 변경관련 업무절차 1부.  끝.

	도시철도계획부장
수신자	도시철도사업부장,도시철도설비부장
주무관	김태윤		경전철관리과장	代김창환		도시철도계획부장	07/29 정대현
협조자	주무관	이전근
시행	도시철도계획부-6245	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 10층	/
전화	02-772-7156	/전송	02-772-7304	/	train@seoul.go.kr	/	부분공개(5)