투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부공원녹지사업소
수신	공원운영과장
(경유)
제목	준공기한 연기 시행 (선유도공원 유리온실 리모델링공사(건축분야))

1.  시설과-3820호(2020. 7. 29.)와 관련입니다.

2. 우리사업소에서 추진중인『선유도공원 유리온실 리모델링공사(건축)』에 대하여 다음과 같이 준공기한을 연기하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 선유도공원 유리온실 리모델링공사(건축)

나. 공사기간 : 2019. 11. 25. ~ 2020. 7. 30.

다. 계약금액 : 금247,161,000원정(금이억사천칠백일십육만일천원)

라. 계약업체 : 륜덕종합건설 주식회사 대표 이강태

마. 연기 준공기한 : 2020. 9. 11.

바. 연기사유 귀책소재 : 서울특별시 서부공원녹지사업소

사. 지체상금 부과여부 : 미부과

아. 준공기한 연기사유

○ 현재 진행 중인 조경분야 공사 완료 후 창호 및 출입문 마감공사가 진행되어야 함에 따라 준공기한 연기가 필요함.

붙임  1. 준공기한 연기 조치 의뢰서

2. 준공기한 연기 검토 보고서 1부.  끝.

	시설과장
주무관	이석중		주무관	박선미		시설과장	07/29 代이용원
협조자
시행	시설과-1432	(		)	접수		(		)
우	03901	서울특별시 마포구 월드컵로 243-60 (성산동) 서부공원녹지사업소	/	http://worldcuppark.seoul.go.kr
전화	02-300-5568	/전송	02-300-5569	/		/	대시민공개