코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
		서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	용역 계약변경(준공기한 연장) 의뢰

1. 도시농업과-11606('20.7.29.)호와 관련입니다.

2.「서울먹거리창업센터 원상복구 및 인테리어 설계용역」준공기한 연장을 위한 용역 계약변경을 다음과 같이 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 서울먹거리창업센터 원상복구 및 인테리어 설계용역

나. 계약업체 : 스튜디오 필드오트리

다. 계약금액 : 금33,460,000원정(금삼천삼백사십육만원)

라. 변경사항 : 계약기간 연장

- (변경 전) ’20. 6. 15. ~ ’20. 8. 3. → (변경 후) ’20. 6. 15. ~ ’20. 8. 20.

붙임  1. 합의각서 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 1부.

3. 용역 연장방침 1부.  끝.

							도시농업과장
주무관							김동석			도시농업정책팀장					한광모					도시농업과장					07/29 김광덕
협조자
시행			도시농업과-11705									(						)		접수											(						)
우	04514					서울특별시 중구 서소문로 124 (서소문동)시티스퀘어 18층															/
전화		02-2133-5434						/전송			02-768-8948					/													/	대시민공개