투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	총무부장
(경유)
제 목	관급자재 계약변경 의뢰(거점형 키움센터 관급자재 복사난방기)

1. 설비부-11041(2020.7.28.)호 관련입니다.

2.『지역대표 거점형 키움센터(1호) 조성 기계공사』관급자재 복사난방기 구매 계약을 아래와 같이 변경 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 변경사유: 건축평면변경 및 선행공정 지연

나. 변경내용(조달수수료 제외)

계약상대자 (납품요구번호)	품 명	금 액 [단위: 원]			납품기한		비고
		변경 전	변경 후	증 ․ 감	변경 전	변경 후
샤프에너지테크㈜ (122022108000)	복사난방기	4,220,000	4,624,000	증 404,000	2020.7.30.	2020.8.31.

붙임  1. 방침서 1부.
2. 조달물품변경구매요구서 각 1부.
3. 합의각서 각 1부.  끝.

	설비부장
주무관	박성수		시책사업과장	이종근		설비부장	07/29 이달영
협조자
시행	설비부-11062	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화		/전송		/		/	부분공개(5)