문서번호	시설보수과-2664
결재일자	2020.7.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	시설보수과장	난지물재생센터소장
김승조	우배용	조선행	07/29 한성현
협 조

「난지수계 차집관로 내부조사 용역」

실정보고 및 설계변경(1회) 검토 보고

2020.07

시설보수과

「난지수계 차집관로 내부조사 용역」

실정보고 및 설계변경(1회) 검토 보고

『2020년 난지수계 차집관로 내부조사 용역』 원활한 공사를 위한 시공사 실정보고 건의 검토결과를 보고 드림.

와콘2020-07-10(2020.07.28.)호와 관련입니다.

□ 공사개요

○ 용 역 명 : 난지수계 차집관로 내부조사 용역

○ 규 모 : 차집관로 내부조사 21km

○ 용역비 : 161,511천원

○ 용역사 : ㈜와콘엔지니어링

□ 추진경위

○ 2020.07.28. : 실정보고 제출(시공사 → 난지물재생센터)

□ 실정보고 주요내용

○ 차집관거 사각(2.2x2.2m) 맨홀뚜껑 개폐를 위한 굴삭기 도입이 필요함

-  개폐 후 맨홀 틀 청소 및 주변 정리 작업이 필요함

○ 자전거 전용도로 및 차량 교행이 필요한 구간에 위치한 맨홀을 개폐하여 작업

하기 위해서는 보행 안전 도우미 도입이 필요함

○ 조사완료 구간 현황

구 분		연 장(m)	비 고
규 격	1.8x1.8	817.8
	2.3x2.3	5,522.4
	3.0x3.0	4,399.5
	3.7x3.7	10,269.1
	합 계	21,008.8

○ 변경내역서

품 명	규 격	단 위	수 량	합 계	비 고
하수차집관내 CCTV 조사	수심 : 30cm 이상	km	19.0	141,606,153	(증)14,971,495
		km	21.01	156,577,648
	수심 : 30cm 미만	km	1.4	5,222,214	(감)5,222,214
		km	-	-
맨홀뚜껑 개폐	굴삭기	hr	-	-	(증)14,875,500
		hr	236	14,875,500
맨홀뚜껑 청소	보통인부	개소	-	-	(증)4,751,283
		개소	189	4,751,283
보행안전 도우미	보통인부(2인/1일)	hr	-	-	(증)4,917,201
		hr	163	4,917,201
소 계				146,828,364	(증)34,271,636
				181,100,000
부가세(10%)				14,682,836	(증)3,427,164
				18,110,000
합 계				161,511,200	(증)37,698,800
				199,210,000

□ 검토자 의견

○ 맨홀뚜껑 개폐는 인력으로 개폐가 불가하여 굴삭기등의 장비가 필요하며,

보행안전도우미는 안전을 위하여 필요한 사항으로 당초 설계서에 누락 되었으므로 반영하는 것이 적정하다고 판단됨.

○ 굴삭기 및 보행안전도우미의 물량 산출은 실재 투입된 물량으로 산정하고자 함.

작업일자	작업시간	연장(m)	맨홀개폐 (개소)	굴삭기 (hr)	보행안전 도우미
20.04.24	11	817.8	9	11	-
20.04.27	11	1,108.3	9	11	-
20.04.28	12	1,094.3	9	12	-
20.04.29	12	1,519.3	10	12	-
20.04.30	11	775.0	9	11	11
20.05.01	11	757.5	6	11	11
20.05.06	11	1,003.5	7	11	11
20.05.07	11	562.2	8	11	11
20.05.29	11	1,024.4	10	11	11
20.05.30	11	1,439.1	10	11	11
20.06.01	11	1,403.2	10	11	11
20.06.02	11	735.4	7	11	11
20.06.03	11	628.1	12	11	11
20.06.04	11	749.2	13	11	11
20.06.05	11	686.2	7	11	11
20.06.23	12	820.6	10	12	12
20.06.29	8	256.4	10	8	8
20.07.11	12	1,209.4	6	12	-
20.07.15	12	1,210.4	10	12	-
20.07.16	14	2,359.4	11	14	-
20.07.17	11	900.7	6	11	-
소 계	236	21,060.4	189	236	141

□ 조치계획

○ 실정보고 건은 적정한 것으로 판단되는  바, 실정보고 승인 통보코자 하오며, 증액하여(당초 161,511,200원 → 변경 199,210,000원) 계약변경 추진코자 합니다.

붙임 : 관련공문 1부.  “끝”.