문서번호	건축부-12881
결재일자	2020.7.30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		건축관리과장	건축부장
서경식		代이용선	07/30 진경은
협조
	주무관		김민희

『스페이스 살림 조성공사』

본부위원회 조치결과 및 설계변경·공사시행 검토보고

2020. 7.

도시기반시설본부

(건 축 부)

『스페이스 살림 조성공사』

본부위원회 조치결과 및 설계변경·공사시행 검토보고

『스페이스 살림 조성공사』와 관련하여, 설계변경자문 본부위원회(2020-2차) 검토의견 조치 및 승인 요청 검토 및 이에 따른 설계변경·공사시행 검토 보고

**********************

****************************************************

□ 사업개요

○ 위    치 : 서울시 동자구 대방동 340-3 외 3필지

○ 규    모 : 지하2층, 지상7층, 연면적 17,957㎡

○ 공사기간 : 2017.12.26. ~ 2020.09.25.

○ 시 공 사 : (주)호반건설 외 2개사

○ 감 리 자 : (주)희림종합건축사사무소 외 1개사

○ 건축공사비(도급액) : *********

○ 공 정 율 : 89%

□ 설계변경자문 본부위원회 의견 및 조치

구분	위원회 검토 의견	반영여부	조치내용	비고
표기 정정	*************** ***************** ************************	**	****************** ******************* ******************	********
일위 대가	************* ****************	**	*********************************************** ********************	********
수량 산출	************************************	**	******************* ************************	** **
위원회 운영	******************************************** **********************	-	****************** ******************************	******

※ *********************************************************************************************

□ 공종별 설계변경 내역(자문 결과 반영)

○ 공종별 공사비 검토(직접공사비)

(단위: 원)

구분	공종	공 사 비			자문회의 반영사항	비고
		당 초	변 경	증 감
건축	공통가설	***********	***********	**********
	가설공사	***********	***********	**********
	조적공사	***********	***********	***********
	석공사	***********	***********	***********
	타일공사	**********	***********	***********
	목·수장	*************	*************	***********
	방수공사	***********	***********	**********
	지붕 홈통	*********	**********	**********
	금속공사	***********	***********	***********
	미장공사	***********	***********	***********
	창호공사	***********	***********	***********
	유리공사	***********	***********	**********
	도장공사	***********	***********	**********
	테라코타	***********	***********	**********
	시트 판넬	**********	**********	*********
	기타	**********	***********	**********
	마이크로파일	**********	**********	**********
	미변경분	*************	*************	*
	소 계	*************	**************	*************
토목	토공사	***********	***********	**********	********
	우수공사	**********	**********	*********
	포장공사	**********	**********	*********
	부대공사	**********	**********	**********
	철거공사	**********	**********	*********
	흙막이	*************	*************	***********
	자재대	**********	**********	**********
	미변경분	**********	**********	*
	소 계	*************	*************	***********
소 계		**************	**************	***************

※ *****************************************************************************************************************************************************************

○ 공사비 증·감 합계 (직접공사비+간접비)

(단위: 원)

구 분	공 사 비			비고
	당 초	변 경	증 감
건 축 (1)	*************	**************	*************
토 목 (2)	*************	*************	***********
조 경 (3)	***********	***********	*
직접공사비 (1+2+3)	**************	**************	*************
간접공사비, 관리비,이윤 등	*************	*************	***********
부가가치세	*************	*************	***********
총 공사비	**************	**************	****************

□ 건설사업관리자 검토 의견

○ ***********************************************************************

□ 설계변경 총괄 내역

(단위: 원)

구 분	변경 전	변경 후	증·감	비고
총차	***************	***************	****************	금회 변경
3차	**************	**************	****************	금회 변경
4차	**************	**************	*************	금회 계약

※ ************************************************************************************************************

□ 처리 의견

○ ************************************************************************************

○ *************************, ********************************.

붙임: 1) 설계변경 자문위원회 조치결과 승인요청서 1부

2) 설계변경 내역서 1부.  끝.