문서번호	시설과-2907
결재일자	2020.7.30.
공개여부	부분공개(5 7)
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설과장
김민주	김석광	07/30 김재균
협 조

『호현당 CCTV시스템 개선사업』실정 보고

2020. 7.

중부공원녹지사업소

(시설과)

『호현당 CCTV시스템 개선사업』실정 보고

『호현당 CCTV시스템 개선사업』추진과 관련하여 설계물량 검토 및 현장

여건 변화 등에 따라 발생한 실정 사항을 아래와 같이 보고드림

Ⅰ		사업개요

□ 사 업 명 : 호현당 CCTV시스템 개선사업

□ 사업기간 : 2020. 5. 29.~2020. 7. 31.

□ 사 업 비 : *********

Ⅱ		보고내용

□ 주요 실정사항

(단위 : 천원)

구 분	현황 및 문제점	검 토 의 견	관급자재비 (증▪감)
주자재부 (NVR,CCTV)	❍ 호현당 외곽 정자 초입부근 CCTV카메라 1대 추가교체 필요	❍ 영상감시장치(카메라) 수량 증가 - 10대 → 11대	(증)1,727
옵션부 (굴착, 케이블 포설 등)	❍ 카메라 물량증가 및 네트워크 구성 변경에 따른 물량 증가 - UTP케이블, 광케이블 물량증가 - 광접속 개소 증가 - 풀박스 증가 - 각종 시험 횟수 증가	❍ 물량 증가 반영 - UTP케이블10m, 광케이블 255m 증가 - 광접속 10개소 증가 - 풀박스 1개증가 - 각종 시험 총 3회 증가 ❍ (증)2,535천원	(감)21,207
	❍ 카메라 및 광케이블주의 안내판 설치 필요	❍ 안내판 35개 추가 설치 ❍ (증)5,546천원
	❍ 추가 카메라 설치 예정 지역 케이블 포설 필요	❍ 난연전력케이블(F-CV) 200m 추가 포설 ❍ (증)920천원
	❍ 기존 배수로 이용 구간 방수 후렉시블 대체 필요	❍ 1종 금속제 가요전선관 200m 추가 ❍ ELP전선관 304m 감소 ❍ (증)495천원
	❍ 카메라 부착을 위한 브라켓 설치 필요	❍ 카메라브라켓 10개 추가 설치 ❍ (증)1,413천원
	❍ 광케이블 측정시험 불필요	❍ 광케이블 측정시험 미실시로 수량 감소 ❍ (감)326천원
	❍ 토공사 실 물량 산정	❍ 인력터파기, 되메우기, 잔토처리, 아스팔트커팅 물량 조절 ❍ (감)31,789천원

Ⅲ		소요예산

□ 소요예산 내역

구 분	변 경 전(구성비)	변 경 후(구성비)	증▪감액
********	*****************	*****************	*************
******* *****************	*****************	*****************	**************
*********	***************	***************	*
집행액 합계(1+2+3) **********	**************	************	**************
****	********	************

□ 예산과목 : 공원녹지정책과, 공원녹지정책개발 및 만족도개선, 공원유지관리 및 이용활성화, 공원내 CCTV 개선사업, 시설비(100-401-01)

Ⅳ		조치계획

□ 상기와 같이 설계물량 검토 및 현장여건 변화 등에 따른 실정을 반영하여 원활한 사업추진에 만전을 기하고자 하며, 추후 물량변경시 정산▪반영코자 함

□ 집행잔액에 대하여 남산공원 내 노후된 저화소 CCTV시스템    개선에 사용하고자 함

붙임  : 물량변경내역서 1부.  끝.