투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	명남종합건설(주)
(경유)
제목	실정보고 승인 및 현장관리 철저

1.한강제2020-26호(2020.7.17)호와 관련된 실정보고건에 대하여 검토하고 아래와 같이 승인 하오니 안전 및 정밀시공에 철저를 기하여 주시고 변경 수량에 대하여는 추후 설게변경시 반영 하시기 바라며,

2.아울러‘20.7.30일 16:00현재 팔당댐 방류량 4,330톤으로 한강수위가 상승되고 있으니 방류량 및 인천조석간만의차 등에 주의를 기울여 한강둔치 침수상황에 발생시 사전에 장비대피,현장사무실 대피,유수장애시설(안전휀스,자재등) 철거등 현장관리에 철저를 기하여 피해가 발생치 않도록 조치하여 주시기 바랍니다.

□ 실정보고 검토회신 사항

실 정 보 고	회 신 내 용	비고
자전거도로 선형변경	실정보고대로승인
브라켓설치	실정보고대로승인(2.0*8.0m)
호안사면 보호	실정보고대로승인
기타사항	시공전 협의시공

. 끝.

	서울특별시한강사업본부장
주무관	김일문		기반시설과장	07/30 代정창수
협조자
시행	기반시설과-2615	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257	/
전화	02-3780-0674	/전송	02-3780-0744	/	kim751515@seoul.go.kr	/	대시민공개