문서번호	정수시설과-5372
결재일자	2020.7.30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
김영후		정재현	07/30 김중영
협조
	주무관		장현순

설계변경 시행 보고(제1회) 뚝도아리수정수센터 조경관리용역

2020. 07

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

설계변경 시행보고(제1회)

《 뚝도아리수정수센터 조경관리용역 》

정수생산 시설을 방문하는 시민에게 안전하고 깨끗한 아리수 이미지를 제공하고자 추진중인“뚝도아리수 정수센터 조경관리용역”에 대하여 현장여건에 따른 일부 공종별 계약물량 변경 및 도급비 변경에 따라 설계변경하여 용역 추진에 만전을 기하고자 함

용 역 개 요

▢ 용 역 명 : 2020년 뚝도아리수정수센터 조경관리용역

▢ 규    모

○ 잔디깍기 : 28,460㎡            ○ 풀깍기 : 35,070㎡

○ 풀 뽑 기 : 81,330㎡            ○ 수목전정 : 90주

▢ 총용역비 : 111,789천원

○ 도급비 101,789천원/  관급비 10,000천원

▢ 용역기간 : 2020.03.19. ~ 12.21

***************************

설계변경 현황

▢ 변경 내용

○ 변경사유 : 신규공종 반영 및 공종 간 계약 물량 조정

○ 물량 증 ․ 감 현황

공 종	단위	물 량			비 고
		당 초	변 경	증 ․ 감
잔디깍기	㎡	28,462	33,630	5,168
풀 깍 기	㎡	35,074	39,231	4,157
풀 뽑 기	㎡	81,334	85,943	4,609
관목전정	㎡	160	2,340	2,180
수목제거	주	88	74	△14
지주목제거	EA	0	1,230	1,230
잔디보식	㎡	0	46	46

▢ 설계변경(제1회)

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
총용역비	111,789,600	111,789,600	-
도 급 비	101,789,600	111,789,600	-
관 급 비	10,000,000	10,000,000	-

조 치 의 견

▢ 상기와 같은 내용으로 설계변경 시행하고 용역 추진에 만전을

기하고자 함.

첨   부 : 설계변경 내역서(제1회) 1부.  끝.