문서번호	기반시설과-2608
결재일자	2020.7.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기반시설과장	시설부장
김일문		代정창수	07/30 전영주
협 조

『성수대교북단외2개소승강기설치공사』

실정보고에 대한 검토보고(성수북단 보행로개선)

2020. 7.

시설부 기반시설과

「성수대교북단외2개소 승강기 설치공사」

실정보고에 대한 검토보고

「성수대교북단외2개소승강기설치공사」중 의 성수대교북단 보행로 선형불량으로 시민불편사항이 있어 이에 대한 개선 검토 보고임.

Ⅰ		공사개요

□ 공  사  명 : 성수대교북단외2개소 승강기설치공사

□ 공사기간 : 2019. 11. 04. ~ 2020. 12.20.

□ 계약상대자 : ㈜명남종합건설 대표 박남재

□ 계약금액 : 3,279백만원(1차 1,096백만원, 2차 2,183백만원)

Ⅱ		실정보고

❍ 관련근거

- 기반시설과-1232(‘20.6.9)- 자전거도로 개선방안 보고

- 한강제2020-26(‘20.7.6)- 실정보고

- ****-2157(‘20.7.16)- 도하터널 사용관련 군부대협의(의견없음)

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제75조

(그 밖에 계약내용의 변경으로 인한 계약금액의 조정)

❍ 실정보고내용

1) 현황

- 성수대교북단 승강기 설치 위치는 보행로 협소하며 곡선구간으로   형성되 있음.

2) 문제점

- 보행로 협소구간 이용시 자전거이용자와 보행자간 접촉사고우려

- 승강기설치공사후 이용시민의 승강기 이용자는 횡단보도 2곳을   이용하여야 하는 불편과 이로인한 사고의 위험성 상존

- 계단기초 설치구간 제방사면 설치로 기존호안브럭 훼손에 따른 홍수시 세굴로 인한 시설물 안전 취약

2) 대책

- 기존의 강변북로측 설치된 보행로를 한강변측으로 L=150m구간에 대하여 변경설치 및 자전거도로와 보행로 분리 중앙녹지 설치,

보행로 협소구간에 대하여는 서울숲연결 도하터널 상부 구조물에 브라켓 설치(폭 2.0m, 연장8.0m) 확장 시공하여 충분한 보행로 확보

❍ 수량 및 공사비 현황

공 종	단 위	수 량			금 액
		당초	변경	증·감	당초	변경	증·감
합 계					16,500	171,952	155,452
세굴방지보호공	㎡	231	309	78	1,693	2,255	562
포장철거공	㎥	0	140	140	5.091	5.091	5,091
보도블럭포장	㎡	165	317	152	5,143	9,057	3,913
경계석설치	m	98	489	391	4,187	18,081	13,894
아스콘포장	㎡	0	849	849	0	32,494	32,451
보호확장(브라켓) (2.*8m)	1식	0	1	1	0	17,445	17,445
배수로복개	m	0	30	30	0	3,733	3,733
호안블럭설치	㎡	0	47	47	1,973	1,973	1,973
난간설치	m	0	75	75	0	12,956	12,956
직접공사비					11,066	102,786	91,720
제경비					3,934	33,914	29,980
공급가액					15,000	136,700	121,700
부가세					1,500	13,670	12,170
도급비					16,500	150,370	133,870
폐기물처리	톤	0	326	326	0	9,894	9,894
관급자재비	1식	1식	1식	1	0	11,688	11,688

❍ 검토의견

- 협소구간개선 : 평소 이용자들의 불편과 사고의 위험이 있었던 곳으로 서울숲연결 지하통로(도하터널)상부에 브라켓 시공하여(B=2.0M,L=8.0M))보행로 확보하여 이용자 안전도모 필요,

- 보행로 위치변경: 강변북로측 기존 보행로(L=150M)를 강변측으로 변경설치 하여 이용자의 안전과 쾌적한 보행환경 조성필요

- 난간설치,측구복개 : 이용자의 안전과 편의를 위하여 설치필요

- 사면보호공 : 향후 한강수위 상승시 세굴 방지를 위하여 콘크리트 보호공 설치후 호안블럭 설치필요

Ⅲ		조치계획

○ 공사: 기존의 보행로를 개선하여 변경시공함이 시민이 안전과 쾌적한 보행환경을 조성하는데 적절할 것으로 사료되는바 변경 시공토록 승인하고 설계변경시 정산 시행코자 함.

○ 예산: 승강기설치공사 집행잔액과 보험료 정산잔액 및 전기공사 낙찰차액 사용하여 시행.

붙임 : 관련문서 각1부.  끝.