문서번호	시설보수과-2690
결재일자	2020.7.30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	시설보수과장	난지물재생센터소장
박종석	우배용	조선행	07/30 한성현
협 조

발전기동 소화설비 설계용역 완수기간 연장 검토보고

2020. 07.

난지물재생센터

[시설보수과]

발전기동 소화설비 설계용역 완수기간 연장 검토보고

센터내 발전기동 소화설비 교체에 따른 사업과 관련하여 설계용역의

완수기간을 연장하여 사업이 충실하게 진행될 수 있도록 조치하고자 함

1		추진근거

❍ 발전기동 소화설비 설계용역 계획(시설보수과-2186호,2020.6.29.)

2		계약현황

❍ 용 역 명 : 발전기동 소화설비 실시설계용역

❍ 용역업체 : ㈜신화방재 (대표 이준규)

❍ 용역금액 : 금15,675,000원(금일천오백육십칠만오천원)

❍ 용역기간 : 2020. 07. 13. ~ 2020. 08. 09.

❍ 주요공정 : 가스소화설비 철거에 따른 대체소화설비 설계용역

3		변경사유

❍ 용역기간 변경

– 지역난방공사구역 1층 발전기실 내부에 물분무소화설비 선정에 따른 시공사례

수집 및 법적 검토 시간 필요

• 센터의 CH4 공급가스로 가동하는 터빈 발전기에 화재 발생시, 실내를 완전

밀폐 구성을 해야 효율성을 기대할 수 있는 가스소화설비와 사후관리가

용이한 물분무소화설비를 비교 검토하고자 함

• 물분무소화설비 시공 사례가 드물어 이에 대한 법적 검토 시간이 필요

4		변경계약 추진

구 분	변 경 후	변 경 전	비 고
용 역 금 액	금15,675,000원	금15,675,000원	변경없음
용 역 기 간	’20. 07. 13. ~ 09. 18.	’20. 07. 13. ~ 08. 09.	40일 연장

❍ 용역변경 내용

❍ 연기 귀책 사유 : 서울특별시 난지물재생센터

❍ 지체상금 부과여부 : 미부과

❍ 관리과에 용역기간 변경요청 시행. 끝.