투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신	서울시설공단이사장
(경유)
제목	추가 공정반영 요청

1. 「시민의숲 노후 전기시설 정비공사」와 관련입니다.

2. 귀 공단에서 위탁감독 수행중인「시민의숲 노후 전기설비 정비」공사 공정변경 및 추가 발생에 따른 현장회의 등을 통한 협의한 다음 사항과 기 실정보고한 사항을 설계변경시 반영 조치하여 주시기 바랍니다.

구분	현안 사항	추가공사 사항	비고
공원등	■ 수목 성장으로 야간 조명부 족 구간 다수 발생	■ 등 추가설치로 야간조명 부족 해소
분전반	■ 분전반 노후 용량부족 ▶가로등분전반 내에서 일반용부하 를 차단기 없이 중복 분기 ▶분전반기초 밖 노출배관 중복설치	■ 분전반 용량증설
화장실	■ 화장실 조명 노후, 수동조작 ▶ 운동장화장실 조명 주야 수동점멸 ▶ 화장실 전기시설 노후, 구형 조명	■ 화장실 전기시설 정비
바베큐	■ 바베큐장 등기구 노후, 구형 ▶ 글로브 노후, 전력소비 큰 전구사용	■ 노후 조명을 저전력 LED로 정비
정자등	■ 전기시설 노후, 접속함 파손	■ 전기절약형 시설로 정비

3. 또한 추가 공정발생에 따른 공사기간 연장도 검토하여 주시기 바랍니다.  끝.

	동부공원녹지사업소장
주무관	강희진		시설관리팀장	조민형		시설과장	07/31 박종수
협조자
시행	시설과-2453	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로20길 33 (신대방동)	/
전화	02-2181-1156	/전송	02-2181-1169	/	jhg815@seoul.go.kr	/	부분공개(5)