문서번호	도시철도사업부-7752
결재일자	2020.7.31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		동북선1과장	도시철도사업부장
김태성		김용선	07/31 이철
협 조
	주무관			박노성
	주무관			박중모
	주무관			박성준

별내선(8호선연장) 1공구 건설공사

중앙말뚝 개구부 보조파일 설치 및 철거 실정보고 검토보고

2020. 7.

도시기반시설본부

(도시철도사업부)

별내선(8호선연장) 1공구 건설공사

중앙말뚝 개구부 보조파일 설치 및 철거 실정보고 검토보고

별내선(8호선연장) 1공구 건설공사 책임건설사업관리기술자로부터 제출된 중앙말뚝 개구부 보조파일 설치 및 철거 내역에 대한 실정보고 사항에 대한 검토 보고임

	1		공사개요

○ 공 사 명 : 별내선(8호선연장) 1공구 건설공사

○ 위    치 : 강동구 암사역 ~ 암사역사 생태공원 ~ 현대홈타운앞

○ 규    모 : 연장 1,184m(정거장 1개소 포함), 모란차량기지 유치선(7편성)

○ 계약금액 : 90,742백만원(3차 23,200백만원)

○ 공사기간 : ’17.8.23.~’23.8.21.(3차 ’20.1.1.~’20.12.31.)

○ 시 공 사 : 쌍용건설(주)

○ 건설사업관리 : ㈜동해종합기술공사 외 3개사

	2		추진경위

○ 2020.03.17. : 중앙파일 해체 계획 변경 시공상세도 승인 요청(시공사⇨관리단)

○ 2020.03.18. : 중앙파일 해체 시공상세도 승인(관리단⇨시공사)

○ 2020.04.02. : 보조파일 설치 및 철거 내역 검토 요청(시공사⇨관리단)

○ 2020.04.02. : 보조파일 설치 및 철거 내역 검토의견 요청(관리단⇨원설계자)

○ 2020.04.13. : 보조파일 설치 및 철거 내역 원설계자 회신(원설계자⇨관리단)

	3		실정보고 내용

○ 중간파일 해체 시공계획(변경)

- 원설계 및 추가(변경) 도면

원설계(B-Type)			추가(A-Type)
1단계	2단계	3단계	4단계

- 중간파일 추가시공 사유

· 중앙말뚝 해체 시 4단계에 해당하는 보조파일 A-Type 설치에 필요한 해체 시공이 누락되어 있음

· 원설계자 검토의견 결과도 중앙말뚝의 축방향 연결 및 해체에 대한 추가필요 답변

- 공사비 증․감

(단위:천원)

구 분		당 초		변 경(안)		증 ․ 감		비 고
		수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액
본선 1구간	보조파일 설치 및 철거 (A-TYPE,H-300X305)	-	-	243개소	20,005	243개소	20,005
정거장	보조파일 설치 및 철거 (A-TYPE,H-300X305)	-	-	206개소	16,959	206개소	16,959
본선 2구간	보조파일 설치 및 철거 (A-TYPE,H-300X305)	-	-	23개소	1,894	23개소	1,894
간 접 비		-	-	1식	9,847	1식	9,847
공사비 합계		-	-		48,705		48,705

※ 단가 적용 검토

-  보조파일 설치 및 해체(A-Type) : 신규단가(‘20년 상반기단가, 건설표준품셈)에  협의율 적용 : (100%+낙찰율%)/2 = (100+85.392)/2 = 92.70% 적용

-  강판구멍뚫기, 강판수동절단, 강판전기용접, 볼트조이기, 볼트풀기 : 기존단가 적용

○ 원설계자 검토의견

- 상부슬래브 시공시 중앙말뚝 설치위치의 구조물 타설 및 방수 등의 작업 진행을 위해 서울시 적산기준 상에는 A-Type과 B-Type을 현장여건에 따라 적용토록 제시하고 있음.

- 원설계에서는 안전성, 경제성 및 시공성 등을 감안하여 기존 중앙말뚝을 유지하면서 상부슬래브 시공이 가능토록 중앙말뚝 측면에 보조파일 설치 및 지지체(Jack)을 연결하고 중앙말뚝을 절단한 후 상부슬래브 개구부를 시공하는 B-Type을 적용함.

- 구조물공사 완료후 후속공정으로 되메우기와 복공판 철거 후 중앙말뚝을 제거하여야 하므로 중앙말뚝 직하부에 지지체(Jack)를 설치한 후 말뚝 측면에 부착한 보조파일을 제거하여 일축구조로 변경하는 것이 시공성 측면에서 효율성이 클 것으로 사료됨.

- 변경하여 적용할 경우, B-Type 적산기준상에 포함되지 않는 중앙말뚝의 축방향 연결 및 해체에 대한 비용(볼트조이기, 보조파일 철거 등)에 대한 추가 고려가 필요할 것으로 판단됨. 단, 지지체, 마구리판, 볼트, 토류판 등의 재료에 대해서는 손상여부 등을 확인하여 현장여건을 고려한 신규 또는 재사용 등을 결정 및 적용하여 본래의 성능이 확보토록 해야 할 것이며, 수시점검 등의 계획을 수립이 필요함.

○ 책임건설사업관리기술자 검토의견

- 중앙말뚝 개구부 보조파일 설치 및 철거 내역에 대한 실정보고를 상기와 같이 검토결과 수량 및 공사비 산출 등 적정하게 산출되었으며,

- 공사계약 일반조건 제6절 1.설계변경 가.1)항 (설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우) 의거 실정보고 승인함이 타당할 것으로 판단됨.

	4		조치의견

○ 중간파일 해체 시공계획에 따라 B-Type보조파일을 설치하여 개구부 마감 후 A-Type 보조파일로 변경토록 되어있으나, A-Type 보조파일 설치 및 해체에 대한 내역이 설계내역에 누락되어 있는 실정으로, 책임건설사업관리기술자의 의견과 같이 원안 승인하고,

○ 향후, 설계변경자문위원회의 자문결과를 반영하여 설계변경 및 계약금액 변경을 추진하고자 함.

붙임  1. 건설사업관리단 실정보고서 1부.

2. 시공사 실정보고서 1부.  끝.