코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	****
(경유)
제목	2020년 악취방지시설 설치 공사기간 연장 수리 알림

1. **** EA20-0730-01(2020.7.30.)호와 관련입니다.

2. 2020년 악취방지시설 설치지원 사업 공사기간 연장 건에 대하여 2020 직화구이 음식점 악취·미세먼지 저감을 위한 악취방지시설 설치지원 추진계획에 의거 아래와 같이 변경수리함을 알려드립니다.

○ 공사기간 변경내역

연번	구별	업체명	공사기간		비 고
			변경 전	변경 후
1	**	***********	2020.6.12. ∼ 2020.8.11	2020.6.12. ∼ 2020.8.28	장마로 인해 공사일정 지연
2	**	*******
3	***	*****
4	***	*********
5	**	***********
6	**	**********
7	**	**********
8	**	****

끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	이진		생활환경팀장	이재성		생활환경과장	07/31 임미경
협조자
시행	생활환경과-11820	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동) 서소문청사 1동 12층	/
전화	02-2133-3727	/전송	768-8863(web)	/	wisegenie@seoul.go.kr	/	부분공개(6)