문서번호	설비부-11305
결재일자	2020.8.3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	시책사업과장	설비부장
김수진	代이극희	08/03 이달영

『동부간선도로 확장(3공구) 통신공사』

방재설비 추가 설치 실정보고 검토보고

2020. 7.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『동부간선도로 확장(3공구) 통신공사』

방재설비 추가 설치 실정보고 검토보고

『동부간선도로(3공구) 공사(방음벽 구간)』은 도로터널 방재시설 설치 및 관리지침에 따른 연속터널로 전방터널에 대한 방재설비(도로정보표지판, 진입차단막) 설치를 위한 실정보고 내용을 검토하고 보고 드림

1		공사개요

❍ 사 업 명 : 동부간선도로 확장(3공구) 통신공사

❍ 공사위치 : 상계주공16단지 ~ 의정부시계

❍ 공사규모 : 도로확장 4→6차로, 연장 2.25km(방음터널 1.37km)

❍ 주요설비 : CCTV, 영상검지기, 도로전광표지판 이설 등

❍ 공사기간 : 2017.04.26. ~ 2020.05.31.

❍ 도 급 비 : 1,237백만원

❍ 감 리 단 : 동부엔지니어링주식회사

❍ 시 공 사 : ㈜제일정보통신

2		검토내용

관련근거

❍ 도로터널 방재시설 설치 및 관리지침[국토교통부예규 제139호]

❍ 방재시설 추가 설치 검토보고[설비부-17666호(2019.11.11.)]

❍ 방재설비 재설계용역 발주계획[설비부-5961호(2020.04.23.)]

❍ 방재설비 실정보고 승인요청[동삼감 제2020-201(2020.07.15.)]

실정보고 주요내용

❍ 실정보고 사유

-「도로터널 방재시설 설치 및 관리지침」에 의거 전방터널의 출구와 후방터널의 입구가 500m 미만인 터널을 교통측면에서의 연속터널로 정의하며,

- 교통측면에서 연속되는 터널은 각각의 터널별로 연장등급과 방재등급에 따른 방재시설을 설치하되 도로정보표지판 및 터널진입차단설비는 개별 터널연장의 합을 하나의 터널로 간주하여 방재등급을 산정하고 전방터널에 설치 하여야 함.

- 동부간선도로 3공구 방음터널 3개소(273m, 499m, 343m)는 터널 연장 합계가 1,115m인 교통측면의 연속터널(2등급)에 해당되어 기준 설비인 도로정보표지판 및 터널진입차단설비 설치 대상이므로 설계 반영코자 함.

❍ 설치품목

품 명	구 분	단 위	수 량
			당 초	변 경	증 감
도로정보표지판	신설	개소	-	3	3
터널진입차단막	신설	개소	-	3	3

❍ 설치위치

도로정보표지판: ● / 터널진입차단막: ▮ / 터널화재시 인접도로로 우회: ➡

실정보고 세부내용

❍ 주요자재 변경내용

품 명	단 위	당 초	변 경	증 감	변경사유
1. 케이블 공사	*************
광케이블	*	*	*****	*******	**************************************
폴리에틸렌 난연케이블	*	*	*****	*******
접지용비닐절연전선	*	*	*****	*******
2. 전선관 공사	**************
전선관신설	*	*	*****	*******	**************************************
STEEL 찬넬 설치	**	*	*****	*******
폴리에틸렌전선관(지중)	*	*	***	*******
풀박스	*	*	**	********
3. 부대공정 공사	**********
관로굴착	*	*	**	********	*************************************

❍ 적용단가 검토

- 기존비목 : 증감내역 – 계약단가 적용

- 신규비목 : 물가자료 및 견적서의 최소단가 × 낙찰률 적용(86.749%)

- 노 무 비 : 2020년 상반기 노임표 적용

❍ 개략 공사비 증감 현황                                   (단위: 천원)

구 분		당 초	변 경	증 감	비 고
도급비	직접공사비	*	*******	*******
	간접공사비	*	*******	*******	******
	부가가치세	*	******	******
	합 계	*	*******	*******

건설사업관리기술자 검토의견

❍ “방재설비 재설계 용역” 실시 설계도서 및 시공사 실정보고를 검토한 결과 관련법령 및 산출기준에 맞게 적정하게 산출되었으며, 설계변경소위원회 자문 결과에 따라 설계변경 적용하는 것이 타당함.

보고자 검토의견

❍ 건설사업관리기술자의 실정보고 내용이 적절하다고 판단되므로 실정보고 승인하고, 추후 설계변경 시 설계변경 소위원회의 의견을 반영하여 총무부에 변경계약 의뢰하고자 함.