문서번호	토목부-15110
결재일자	2020.8.3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도시고속도로과장	토목부장
김구		장수철	08/03 김용제
협조

개봉고가 인접건물 현황조사 검토 보고

【개봉고가 성능개선공사】

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 8.

도시기반시설본부

토 목 부

개봉고가 인접건물 현황조사 검토 보고

【개봉고가 성능개선공사】

개봉고가 성능개선공사 진행으로 인한 주변 건물의 영향에 대한 분석 자료로 활용하기 위하여 인접 건물의 현황을 조사하고자 검토 보고 드림.

1		공사개요

❍ 위    치 : 개봉고가차도(구로구 개봉로 68~개봉로 124)

❍ 규    모 : 교량성능개선(DB18→24), 폭 18.9m, 연장 332m

❍ 총사업비 : 22,662백만 원(도급비 12,278백만 원)

❍ 사업기간 : ’19. 8. 12. ~ ’23. 4. 11.

❍ 감리단/시공사 : ㈜유신 외 2개사 / 홍익산업개발㈜ 외 1개사

2		보고내용

❍ 개봉고가 주변 건물에 대한 현황조사를 통해 공사 진행으로 인한 건물의 영향 분석 자료로 활용하기 위하여 시방 규정에 따라 주변 건물의 사전 조사를 실시하고자 함.

- 시방서(1.25 사전조사): 수급인은 현장조사를 통해 현장여건(주변건물)을 충분히 기록하여야 하며, 조사비용은 발주자가 부담한다.

❍ 현황 조사내용

구 분	내 용	비고
대상 건물	- 31개동(상가 27, 주택 2, 아파트 2)
조사 범위	건물 내·외부, 공용부, 지하, 옥상 현황

❍ 위치도

❍ 공사비 증·감 현황

(단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증․감	비 고
직접공사비	-	33,530	33,530
V.A.T	-	3,353	3,353
도급비	-	36,883	36,883

3		조치의견

❍ 개봉고가 주변 건물 현황조사를 시행하고자 하는 책임건설사업관리기술인의 실정보고는 적정하므로 승인 처리하고 추후 설계변경에 반영하고자 함.

❍ 단가적용

- 신규단가에 대해 계약상대자와 성실히 협의를 하였으나 이견이 있어 강제협의율[(낙찰률 82.231%+100%)×1/2] 적용

붙임  건설사업관리기술인 검토의견서 1부.  끝.