문서번호	환경수질과-4037
결재일자	2020.8.3.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		환경수질과장	운영부장
한미라		최동주	08/03 송영민
협조

- 2020년 화장실 제조 구매 -

납품기한 연기 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 8.

한강사업본부

(환경수질과)

- 2020년 화장실 제조구매 -

납품기한 연기 검토보고

한강공원 노후화장실을 교체하기 위한 「2020년 화장실 제작구매」 추진과 관련 아래와 같이 납품기한을 연기하여 설치에 만전을 기하고 함

□ 사업개요

○ 계 약 명 : 2020년 화장실 제작구매

○ 사업내용 : 노후화장실 철거 후 3동 설치

○ 납품기한 : **************************

○ 계약금액 : ************

○ 제조업체 : *************

□ 납품기한 연기 검토내용

○ 연기사유

- 코로나19로 자재수급이 지연되고, 홍수로 인해 화장실 제작에 필요한 절대 공기 부족

○ 기한연기

**************************

*************************.

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

□ 보고자의견

○ 불가항력(코로나19, 홍수 등) 사항에 의한 납품기한 연기 요청이 있어  상기와 같이 납품기한을 연기하여 사업추진에 만전을 기하고자 함

붙임  납품기한 연장 요청공문 1부.  끝.