문서번호	시설관리과-13228
결재일자	2020.8.3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설관리과장	북부수도사업소장
김성호	이승완	08/03 박동석
협 조	급수운영과장		유승효
	급수관리팀장		최용진
	기전팀장		박성철
	시설운영팀장		박미영
	주무관		윤승구

2021년 배수지, 아리수올림터 정밀안전점검 용역 추진 계획

2020. 8.

북부수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

2021년 배수지, 아리수올림터 정밀안전점검 용역 추진 계획

2021년도 배수지 및 아리수올림터에 대하여「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」에 따라 정밀안전점검을 실시하여 시설물의 안전성 확보와 유지관리에 철저를 기하고자 함

Ⅰ		관련근거

□ 시설물의 안전 및 유지관리 관한 특별법 제11조 및 제12조

○ 2021년  안전진단 및 점검대상 통보 : 본부 시설과 –4313(2020. 7. 22.)

○ 안전점검 실시 주기(시설물안전법 시행령 제8조 2항 및 제10조 1항 관련 별표3)

안전등급	정밀안전진단	정밀안전점검
		건축물	그 외 시설물
A 등급	6년에 1회 이상	4년에 1회 이상	3년에 1회 이상
BㆍC 등급	5년에 1회 이상	3년에 1회 이상	2년에 1회 이상
DㆍE 등급	4년에 1회 이상	2년에 1회 이상	1년에 1회 이상

Ⅱ		그 간 추진사항

□ 정밀안전진단(점검) 대상 시설물

구 분	계(개소)		배수지(개소)	아리수올림터(개소)	비 고
1종시설물	계	16	8	8
	급수운영과	7	공릉, 월계, 상계	상계,중계,쌍문1,쌍문2
	시설관리과	9	4.19, 번동소, 우이, 수유5, 수유6	미아, 수유, 우이, 번동

□ 정밀안전진단(점검) 현황

실시연도	계	정밀안전진단	정밀안전점검	비 고
2014년	16개소	공릉배수지 외 15개소 (2개소 A등급)(13개소 B등급)	-	A.B등급
2016년	11개소	-	공릉배수지 외 10개소	B등급
2017년	5개소	-	쌍문1가압장 아리수올림터 외 4개소	A등급
2018년	11개소	-	공릉배수지 외 10개소	B등급
2019년	12개소	공릉배수지 외 11개소		B등급
2020년	3개소	419배수지 외 2개소		진행중

Ⅲ		추진계획

□ 2021년 정밀안전진단(점검) 대상

○ 정밀안전진단 : 없음

○ 정밀안전점검 : 배수지 6개소 281,600㎥/일, 아리수올림터 6개소 57,300㎥/일

구 분		대상 시설물	위 치	용량(㎥/일)	준공연도	비고
정밀안전점검	배수지	계	6개소	281,600
		공릉배수지	공릉동 141-4	170,000	1998	2019년 실시
		월계배수지	월계동 63-4	100,000	1988	내진성능평가대상
		상계2배수지	상계동 산161-2	1,400	1983	2019년 실시
		번동소배수지	번동 148-8	2,000	1988	내진성능평가대상
		우이배수지	우이동 73-146	2,000	1986	내진성능평가대상
		수유6배수지	수유동 산84-5	3,000	1992	내진성능평가대상
	아리수올림터	계	6개소	57,300
		미아 아리수올림터	미아동 691-2	19,900	1980	2019년 실시
		우이 아리수올림터	우이동 73-146	8,600	1983	〃
		쌍문2 아리수올림터	쌍문동 137-59	1,200	1981	〃
		수유 아리수올림터	수유동 605-288	20,400	1989	〃
		번동 아리수올림터	번동 148-18	6,700	1988	〃
		중계 아리수올림터	중계동 27-25	500	1986	〃

□ 정밀안전점검 용역개요

○ 용역내용

용 역 명	시 설 물 명	사업비 (백만원)	담당 부서
	12개소	***
2021년 공릉배수지 외 2개소 정밀안전점검	공릉배수지, 월계배수지, 상계배수지	**	급수운영과
2021년 수유6배수지 외 8개소 정밀안전점검	번동소배수지, 우이배수지, 수유6배수지, 미아 아리수올림터, 우이아리수올림터, 쌍문2아리수올림터, 수유아리수올림터, 번동아리수올림터, 중계아리수올림터	***	시설관리과

○ 추진기간 : 2021. 3. ~ 11. 30.

○ 소요예산 : ******

- 배수지·아리수올림터 정밀안전진단(점검)

□ 계약방법 : 일반공개경쟁입찰

□ 선택과업(내진성능평가) 추가 시행

○ 변경된 내진설계기준(’18년 개정)에 따라 내진성능평가 미시행 시설물은 정밀안전점검시 선택과업으로 추가 시행

‣관련법령:시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법』제12조(정밀안전점검의 실시)

③ 관리주체는 「지진·화산재해대책법」 제14조제1항에 따른 내진설계 대상 시설물 중 내진성능평가를 받지 않은 시설물에 대하여 정밀안전진단을 실시하는 경우에는 해당 시설물에 대한 내진성능평가를 포함하여 실시하여야 한다.

○ 금회 대상 : 배수지 4개소 (월계, 번동 소, 우이, 수유6)

○ 대가 적용 : 간략내진해석 비용(구조,지반,수리해석 소요인원×2.0)

-『기존상수도 내진성능평가요령(국토부)』및『시설물의 안전 및 유지관리 실시등에 관한 지침』 별표26(선택과업비용)의 15.(내진성평가 및 내진보강 방안제시를 위한 필요비용)의 간략내진해석 실시 비용

□ 추진일정

○ 2020. 8.      : 자료조사 및 설계서 작성, 기술용역타당성 심사

○ 2021. 2.      : 용역발주

○ 2021. 3.      : 용역 착수보고회 개최

○ 2021. 3.~ 11. : 용역시행

※ 2021년도 상반기 배수지 청소일정과 병행 시행

○ 2021. 9.~11. : 용역 최종보고회 및 결과 보고

○ 2021.11.     : 용역 준공 및 FMS(facility management system)   실적 입력

Ⅳ		행정사항

○ 정밀안전진단용역 FMS(facility management system) 실적입력 :

용역 준공 후 용역수행 업체 입력

○ 정밀안전진단용역 최종 결과보고 : 본부 시설과

붙임   1. 관련법규(정밀안전진단·정밀점검) 1부.

2. 시설물의 안전 및 유지관리실시 등에 관한 지침 1부.

3. 용역설명서 및 설계내역서, 과업내용서 각 1부. 끝.