문서번호	조경지원과-2557
결재일자	2020.8.3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	조경소재팀장	조경지원과장
윤형진	김정미	08/03 윤학수
협 조

하반기 위험수목 정비공사 추진 계획

2020.  8.

동부공원녹지사업소

(조경지원과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

하반기 위험수목 정비공사 추진계획

공원을 이용하는 시민의 안전과 쾌적한 공원환경 조성을 위하여 아래와 같이 위험수목 정비공사를 시행하고자 함.

1		추 진 방 향

건물 주변의 전도위험이 있거나, 가지가 부러진 대형 수목을 대상으로 전지 혹은 제거

숙련도를 요하는 공정임을 감안하여 전문업체에 의뢰하여 신속히 추진

2		사 업 개 요

사업기간 : 2020. 8.

위    치 : 보라매공원, 시민의숲, 길동생태공원

사업내역 : 위험수목 50주 정비

위 치	사업내용	비고
보라매공원	벚나무 등 2주 제거	대천교회, 보라매병원 주변
시민의 숲	자작나무 등 39주 제거 버즘나무 6주 전정
길동생태공원	참나무 3주 제거	관리건물 지장수목

집행방법 : 수의계약

○ 추진근거 : 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제25조 제1항 5호(장애인기업)

소요예산 : 금23,250천원

예산과목

○ 동부공원녹지사업소 공원운영과, 공원녹지관리 수준향상 및 도시녹화 지원, 공원관리 및 도시녹화 지원, 보라매공원 시설물 정비, 시설비(3,150천원)

○ 동부공원녹지사업소 공원운영과, 공원녹지관리 수준향상 및 도시녹화 지원, 공원관리 및 도시녹화 지원, 시민의숲 시설물 정비, 시설비(5,100천원)

○ 동부공원녹지사업소 공원운영과, 공원녹지관리 수준향상 및 도시녹화 지원, 공원관리 및 도시녹화 지원, 길동생태공원 시설물 정비, 시설비(15,000천원)

3		향 후 계 획

2020.  8. 5. : 공사발주

2020.  8. 28. : 공사준공

4		기 대 효 과

안전사고 발생 위험요소 선제적 정비

태풍 및 집중호우 등에 의한 재난 대비

쾌적하고 안전한 공원 조성

붙임 : 1. 현황사진 1부.

2. 설계내역서 1부.  끝.