투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신	장위건설(주) 대표
(경유)
제목	공사 실정보고 승인 알림[품질시험소 별관 검정시설 이전설치공사(기계)]

1. 장위건설(주) 시험소 제07-19(2020.07.29.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 우리 소에서 추진 중인 “품질시험소 별관 검정시설 이전설치공사(기계)”의 실정보고가 귀사로부터 제출 되어 이를 검토하고 아래와 같이 승인 하였음을 알려드리오니 선 시공 하도록 하여 공사 품질 및 납기 관리에 만전을 기하시기 바라며, 실정보고 사항의 증액 분은 향후 설계변경에 반영하고자 합니다.

-아    래-

가. 관련근거 : 공사계약일반조건 제19조의2【기획재정부계약예규 제493호(2020.05.06.)】

나. 공 사 명 : 품질시험소 별관 검정시설 이전설치공사(기계)

다. 검토결과 : 설계서간 불일치 보완, 설비 유지관리 필요 사항 추가, 우리 소의 요구에 대한

추가공사 내역이 적정하다고 판단함.

공사비 구분	금 액(원)
	당 초	변 경	증 감
합 계(도 급 액)	**********	**********	************

※ 상기 금액은 향후 변경계약 과정에서 변동될 수 있으며, 관급자재비 및 공사기간 변동은 없음.  끝.

	서울특별시품질시험소장
주무관	이진성		계량기검정과장	08/03 오임석
협조자	주무관	윤승욱		주무관	최강용		주무관	김윤곤
시행	계량기검정과-1702	(		)	접수		(		)
우	06763	서울특별시 서초구 태봉로 131 품질시험소 계량기검정과(우면동)		http://infra.seoul.go.kr/quality
전화		/전송	02-513-4680	/		/	부분공개(5)