문서번호	급수운영과-12687
결재일자	2020.8.4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
서장원	代박행종	전결 08/04 이용구
협 조

실정보고서 제출에 따른 검토 보고

(아스팔트 포장두께 증가)

2020. 8. 4.(화)

남부수도사업소

(급수운영과)

『남부순환로 외 1개소 장기사용 송배수관 정비공사』

실정보고서 제출에 따른 검토 보고

우리 사업소에서 발주하여 시설공단에서 감독 중인 “남부순환로 외 1개소 장기사용 송배수관 정비공사” 실정보고서 제출에 대한 검토 결과를 보고 드림

※ 관련문서 : 공사감독2처-12179(2020. 7. 31)

□*공사현황

□ 공 사 명 : 남부순환로 외 1개소 장기사용 송배수관 정비공사

□ 공사기간 : 2020. 5 .6. ~ 2020. 11. 8.

□ 도 급 액 : **************

□ 공사개요 : *********************

□ 도 급 자 : ************

□ 감 독 자 : 시설공단 감독자 김기용

□*공단 보고내용

□ 보고내용 및 검토결과

구분	시설공단 보고내용	우리사업소 검토의견
ASP 포장 두께 증가	당초 전구간 A1도로(ASP t=20㎝)로 설계되어 있으나 현장 굴착한바 시흥IC 좌측램프~우측 램프 간(L=290m) 포장두께가 t=40㎝으로 ASP깨기 및 파쇄물 운반 물량 등이 약 100㎥정도 증가된 실정임. 잔여구간에서도 포장두께가 증가할 경우 사진등으로 기록을 관리하고 추후 실제 발생된 수량 으로 정산코자 함.	- 타당함. 추후 설계변경 시행시 반영할 것.

□*조치계획

□ 상기 검토 의견에 대하여 감독업무를 수행하고 있는 시설공단에 통보하여 공사시행에 만전을 기하고자 합니다.

붙임 : 공단실정보고서 각1부.  끝.