“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	서부수도사업소
수신	서울시설공단이사장
(경유)
제목	공사 실정보고 검토 회신『홍은동 227-2~441-1외 5개소 배급수관 정비공사』

1. 공사감독2처-11579(2020.07.20.)호와 관련입니다.

2. 귀 공단에서 제출한『홍은동 227-2~441-1외 5개소 배급수관 정비공사』에 따른 공사실정보고에 대하여 검토하고 그 결과 아래와 같이 회신하오니 공사감독업무에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 실정보고 내용

1) 대규모 단수 예방 및 추후 유지관리를 위한 중간밸브 추가 설치

2) 설계에 미반영된 지하식 소화전 추가 설치

3) 주행 차량 및 공사장 안전 확보를 위한 교통정리원 추가 배치

4) 보행자 안전 확보를 위한 안전도우미 및 인조잔디 매트 추가 설치

나. 검토 결과

1) 설계와 현장 실정 간 차이로 인하여 발생한 물량 증가, 감소항목이 적정함.

2) 공사현장 안전관리를 위한 안전원 및 교통정리원 등의 추가 배치가 타당함.

3) 현장실정보고의 내용에 따른 시공물량의 증·감 및 교통정리원 및 안전원 추가배치 등에 대하여 추후 설계변경에 반영하시기 바랍니다.  끝.

	서부수도사업소장
주무관	유강현		급수운영팀장	김찬모		급수운영과장	전결 08/04 이병운
협조자
시행	급수운영과-12933	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 서대문고 통일로 26길 41 홍제동 38-69	/
전화	02-3146-3643	/전송	02-3146-3689	/		/	대시민공개