문서번호	의정담당관-6618
결재일자	2020.8.5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		시설관리팀장	의정담당관
박공성		권태섭	08/05 이계열
협조
	주무관		김기탁

공사 준공기한 연기 검토결과 보고

2020.  8.

서울특별시의회사무처

(의정담당관)

공사 준공기한 연기 검토결과 보고

관급자재 납품이 공사 준공일 이후로 예정되어 납품 후 부대공사 등에 필요한 기간 동안 준공기한을 연기하고자 함.

□ 공사개요

□ 공 사 명 : 본관청사 중앙냉난방 및 공조설비 등 개선공사

□ 공 사 비 : *************

□ 계약일자 : 2020. 4. 16.

□ 준공기한 : 2020. 8. 7.

□ 공사업체 :****************

□ 준공기한 연기 검토

□ 준공기한 연기 내용

공 사 기 간			비 고
변 경 전	변 경 후	증 감
‘20. 4. 24. ~ 8. 7.	‘20. 4. 24. ~ 8. 22.	증 15일

□ 계약금액 : 변경 없음

□ 준공기한 연기 사유

- 관급자재로 조달구매 중인 흡수식냉온수기의 납품일자가 공사 준공일 2020. 8. 7. 이후로 예정되어있어 공사에 포함되어있는 흡수식냉온수기 등 부대시설 공사마감에 필요한 기간 동안 준공기한 연기

□ 검토결과

□ 공사에 포함되어있는 관급자재 흡수식냉온수기 등의 부대시설 공사 마감을 위하여 필요한 기간(증 15일) 동안 준공기한을 연기 시행하고자 함.

※ 흡수식냉온수기 등 부대시설 공사에 따른 전기공사도 준공기한을 동일하게 연기 시행

	<전기공사 개요>
□ 공 사 명 : 본관 중앙냉난방 및 공조설비 개선 전기공사 □ 계약금액 : *********** □ 계약일자 : 2020. 4. 24.(계약과 동시 착공) □ 준공기한 : 2020. 8. 7. □ 공사업체 : *************