문서번호	설비부-11505
결재일자	2020.8.5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	환경설비과장	설비부장
이지영	김오열	08/05 이달영

『시립동대문 실버케어센터 건립 기계설비공사』

1차 공사 준공기한 연기 검토보고

2020. 08.

도시기반시설본부

(설 비 부)

「시립동대문 실버케어센터 건립 기계설비공사」

1차 공사 준공기한 연기 검토보고

「시립동대문 실버케어센터 건립 기계설비공사」시행 중, 선행공정(건축) 지연에 따라 기계설비공사(1차 공사) 준공기한을 애래와 같이 연기하고자 검토보고 드림

‣1차 공사 준공기한 : 당초 ’20.08.31. → 변경 ’20.11.02.

Ⅰ		공사개요

□ 공 사 명 : 시립동대문 실버케어센터 건립 기계설비공사

□ 위    치 : 서울시 동대문 답십리동 553외 1

□ 규    모 : 지하1층/지상4층, 연면적 2,990,95㎡

□ 공사기간 : 총차 ’19.10.25.~’21.03.24.(1차  ’19.10.25.~’20.08.31.)

□ 공사금액 : 총차 510,130,870원(1차 30,000,000원)

□ 도 급 사 : 경문이엔지주식회사

□ 감 리 사 : 주식회사 펨코엔지니어링건축사사무소

Ⅱ		관련근거

□ 기계설비공사 1차분 공기연장 요청 : PC20(동대문 실버케어)-310호(2020.08.03.)

Ⅲ		검토내용

□ 변경사유 : 선행공정(건축공사)지연으로 인함

□ 변경내용

구분		당초	변경	비고
준공기한	총차	2021.03.24.	변경없음
	1차	2020.08.31.	2020.11.02	63일 증
계약금액	총차	510,130,870원	변경없음
	1차	30,000,000원	변경없음

□ 건설사업관리기술자 의견

-*************************************************************************

Ⅳ		보고자 의견

□ 건설사업관리기술자의 의견과 같이 1차 공사 준공기한을 연기하는 것이 타당하다고 판단되므로 총무부로 변경계약 의뢰하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

붙임 :  건설사업관리기술자 검토의견서 1부.  끝.