문서번호	전시기획과-4528
결재일자	2020.7.31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		전시기획과장	서울공예박물관장
임하연		채영	07/31 김정화
협조

공예작품설치 지명공모

실무용역 월간 보고[7월]

2020. 7.

서울공예박물관

(전시기획과)

공예작품설치 지명공모

실무용역 월간 보고[7월]

서울공예박물관 공예작품설치를 위한 실무용역을 수행하고 2020년 7월 추진 현황을 아래와 같이 보고함

□ 추진근거 및 경과

❍ 서울공예박물관 공예인테리어 조성계획 (전시기획과-9,’18.11.26)

❍ 서울공예박물관 공예작품설치 지명공모 추진계획 (전시기획과-3487,’19.8.30)

❍ 서울공예박물관 공예작품설치 지명공모 실무용역 시행(변경) (전시기획과-5856,’19.12.16)

❍ 공예작품설치 지명공모 실무용역 착수보고회 결과보고 (전시기획과-6095,’19.12.23)

❍ 공예작품설치 지명공모 선정작가 워크숍 결과보고 (전시기획과-1390, ’20.2.26)

❍ 공예작품설치 지명공모 실무용역 월간보고(’19.12~’20.6)

□ 용역개요

❍ 용 역 명 : 서울공예박물관 공예작품설치 지명공모 실무용역

❍ 사업기간 : 2019.12.~2020.12.

❍ 소요예산 : 171,900천원

❍ 용 역 사 : ******

❍ 주요 과업 내용

-공예작품설치 지명공모 기획‧운영 총괄

-공모진행 및 작품제작 과정기록

-작품운송‧설치 지원

-작품 유지보수 및 관리안전 매뉴얼 작성

-공모 관련 자료전시회 기획 및 설치, 운영

-기타 사업추진 전반에 관한 사항

□ 추진현황

일 시	2020. 7. 1.
장 소	여주 도편제작공방
참 석 자	‧ 실무용역 ******************************************* ‧ 서울공예박물관 : 전시과장, 담당주무관 ‧ 지명공모 선정작가*********
진행내용	- 흙 반죽 과정, 도편캐스팅 작업 촬영 - 분청칠 과정인터뷰

❍ ***작가 1차 촬영

❍

일 시	2020. 7. 2.
장 소	서울공예박물관장실
참 석 자	‧ 실무용역*************** ‧ 서울공예박물관 : 관장, 전시과장, 담당주무관2
진행내용	1차 뉴스레터 소식지 최종 컨펌 작가별 진행공정 보고 및 제작과정 시 사전 검토사항 협의

6월 공정보고

❍ ***작가 4차 촬영

일 시	2020. 7. 6
장 소	선정작가 작업실(파주)
참 석 자	‧ 실무용역 ******************************************* ‧ 서울공예박물관 : 담당주무관 ‧ 지명공모 선정작가*********
진행내용	스툴제작과정, 컨셉 드로잉 및 설계과정 촬영 수납장 제작구상 기록 작품 컨셉관련 인터뷰

❍

일 시	2020. 7. 7.
장 소	선정작가 작업실(곡성)
참 석 자	‧ 실무용역 ******************************************* ‧ 지명공모 선정작가*********
진행내용	원형스툴, 벌집스툴 제작과정 촬영

***작가 2차 촬영

❍ ***작가 3차 촬영

일 시	2020. 7. 9.
장 소	선정작가 작업실(구리)
참 석 자	‧ 실무용역 *************************** ‧ 지명공모 선정작가*********
진행내용	석문 가설치(다듬기 조각)작엄 촬영 문양 조각 작업 촬영

❍ ***작가 4차 촬영

일 시	2020. 7. 16.
장 소	선정작가 작업실(익선동)
참 석 자	‧ 실무용역 ******************************************* ‧ 지명공모 선정작가*********
진행내용	- 오방색 스툴 가마반출 작업 촬영 - 전시 연출 협의

❍ 실무팀 진행회의

일 시	2020. 7. 16.
장 소	익선동 카페
참 석 자	‧ 실무용역********************************************
진행내용	향후 작업 스케쥴 협의(영상편집, 사진보정) 소식지 2차 제작 일정협의

❍ ***작가 안내데스크 제작도면 검토

일 시	2020. 7. 20
장 소	서울공예박물관 2층 회의실
참 석 자	‧ 실무용역 ************** ‧ 서울공예박물관 : 담당주무관2
진행내용	제작도면 검토 수정 및 재검토 사항 확인 운송 및 설치 관련 스케쥴 협의

❍ ***작가 2차 촬영

일 시	2020. 7. 21.
장 소	선정작가 작업실(청주)
참 석 자	‧ 실무용역******************************************** ‧ 지명공모 선정작가 ********
진행내용	전통 방식 흙 반죽 과정 및 여러 가지 표면 장식기법 촬영 가마반입 및 반출 과정 촬영 작가의 하루 연출 촬영

❍ 실무팀 진행회의

일 시	2020. 7. 24.
장 소	용역사 회의실
참 석 자	‧ 실무용역 ****************************** **************
진행내용	촬영결과물 아카이빙 방법론 자문 설치작품 사전 건축자문

❍ ***작가 2차 촬영

일 시	2020. 7. 31.
장 소	선정작가 작업실(가평)
참 석 자	‧ 실무용역 ******************************************* ‧ 지명공모 선정작가 ********
진행내용	인터뷰 영상 촬영 원형 제작과정 및 캐스팅 제작과정 촬영 컨셉 드로잉 촬영

□ 추진실적

추진실적	추진기간	단계	비중	달성율
용역공정관리 ‧ 착수보고회 ‧ 중간보고회 ‧ 최종보고회	‘19.12.~’20.12	실행	6%	50%
공예작품설치 기본계획 전략수립‧환경 분석 ‧ 기본계획수립, 설치공간 분석‧인테리어 협의	’19.12.~’20.3	실행	14%	85%
과업이행 : 기록 ‧ 자문회의, 작가워크숍, 보고회 진행 기록 ‧ 공예작가 작품 제작과정, 완료 기록 ‧ 공예작가 인터뷰 영상기획, 촬영 및 편집	’20.1.~’20.10.	실행	35%	60%
과업이행 : 전시 ‧ 작가작품 전시회 기획‧콘텐츠 구성 ‧ 전시공간 설계 및 제작설치, 작품 운송 ‧ 전시그래픽, 영상콘텐츠 기획 및 설치 ‧ 인쇄물(전시리플렛,안내서,포스터) 제작	’20.5.~’20.10.	준비	25%	15%
과업이행 : 홍보 ‧ 서울공예박물관 홍보계획 수립 및 실행 ‧ 보도자료 작성, 기자간담회 계최 ‧ 온라인 SNS, 오프라인 매체 홍보	’20.5.~’20.11.	준비	15%	20%
준공, 과업완료 ‧ 결과보고서 등 성과품 납품(‘20.12.10)	’20.12.	준비	5%	0%
합 계			100%

※추진기간 및 단계는 일정에 따라 변경 가능

❍ 작품 제작과정 촬영 및 기록 ❍ 중간보고회 ❍ 작품 설치 및 시운전	’20. 5월~9월 ’20. 7월 ’20. 9월

□ 향후계획

붙임 1. 업무현황보고서(7월) 1부.

2. 회의사진 1부.  끝.