투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신	공원운영과장
(경유)
제목	「시민의숲 시설물 정비공사」설계변경(2차) 시행 및 계약변경 의뢰

1. 시설과-2450(2020.7.30.)호와 관련입니다.

2. 우리사업소에서 추진 중인 『시민의숲 시설물 정비공사』에 대하여 아래와 같이 설계변경하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 시민의숲 시설물 정비공사

나. 도 급 액 : 금303,060,000원

다. 공사기간 : 2020. 04. 22. ~ 2020. 08. 10.

라. 도 급 자 : ****************

마. 도급비 변경내역

(단위 : 원)

구 분		공 사 비(원)		증 감	비 고
		당 초	변 경
도급액	공급가액	275,509,091	270,490,910	-5,018,181
	부가세	27,550,909	27,049,090	-501,819
	도급비계	303,060,000	297,540,000	-5,520,000
관 급 액		45,985,180	45,985,180	0
총 공 사 비		349,045,180	343,525,180	-5,520,000

바. 예산과목

- 동부공원녹지사업소 공원운영과, 공원녹지관리 수준향상 및 도시녹화 지원, 공원관리 및 도시녹화지원, 시민의숲 시설물 정비, 시설비및부대비, 시설비(401-01)

- 동부공원녹지사업소 공원운영과, 공원녹지관리 수준향상 및 도시녹화 지원, 공원관리 및 도시녹화지원, 동부공원녹지사업소 산하공원 유지관리, 시설비및부대비, 시설비(401-01) : 5,520천원 감액

사. 공사기간변경 : 해당없음

붙  임 : 1. 설계 변경 보고서 1부.

2. 변경공문 및 변경내역서 각1부.

3. 계약금액조정 검증확인서 1부. 끝.

	시설과장
주무관	김재희		공원조성팀장	하종식		시설과장	08/03 박종수
협조자	재무팀장	곽선아
시행	시설과-2480	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로20길 33	/
전화	02)2181-1156	/전송	02)2181-1169	/	jh116@seoul.go.kr	/	부분공개(5)